2017년 하반기

공약사항 추진상황

2017. 12.

	신 안 군 (기획홍보실)

섬의 시대

섬 가치 재발견

섬들의 고향 신안

목    차

Ⅰ. 총  괄	1

Ⅱ. 공약사업 현황	2

민선6기 2017년 하반기 공약사항 추진상황

총    괄

□ 공약사항 현황 : 44건

공약건수	총사업비	예산확보	향후계획
44	2,471,888	732,163.2	1,739,724.8

□ 추진상황 (종합추진율 79.93%)

완 료	이 행 후 계속추진	추진중	보 류	중 단
18	18	7	1

․ 완료사업

- 십자형 도로교통망 확충 경제발전 도모 (도서개발과)

- 남부권, 북부권 신 해상 교통망 구축 (도서개발과)

- 해상교통보조금 지원제도 개선 (도서개발과)

- 수산물유통 물류센터 건립사업, 수산물 별미축제 정비 (해양수산과)

- 항로가시권 경관조성 (환경녹지과)

- 종합복지센터 건립, 장애인 복지대책 강화 (주민복지과)

- 다문화가정 사회참여 프로그램 운영 (주민복지과)

- 명문학교 육성 지원, 평생교육 활성화 (행정지원실)

- 군민주권 우선 융합시대 창조, 투명하고 공정한 인사운영 (행정지원실)

- 책임지는 신뢰행정 구현으로 융합시대 창조 (세무회계과)

공약사업별

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			추진율 (%,임기내 계획량대비 공정률)	임 기 내 완료가능 여 부	추 진 부 서
			총사업비	예산확보	향후계획
계			2,471,888	732,163.2	1,739,724.8	79.93%
1	신안 발전의 성장동력이 되는 기반시설 확충
1-1	모든 유관기관 관내 이전 추진	2014~ 2018	50	30	20	80%	여	기획 홍보실
1-2	십자형도로망 구축 경제발전 선도	2015~ 2016	5,200	3,700	1,500	완료	여	도서 개발과
1-3	십자형 도로망 구축으로 경제발전 선도	2010~	1,173,300	470,420	702,880	이행후 계속추진 (90%)	부	안전 건설과
1-4	송공연안항 개발을 재추진	2016~ 2018	8,100	7,129	971	이행후 계속추진 (70%)	여	해양 수산과
1-5-1	국립섬 발전 진흥원 유치	2017~ 2022	750		750	30%	부	도서 개발과
1-5-2	의료기관 유치를 통한 군민의료서비스 개선	2015~ 2017	11,808	10,778	1,030	이행후 계속추진 (90%)	여	보건소
1-5-3	중부권 종합 이동민원실 개설	2015~ 2018	40	23.5	16.5	완료	여	민원 봉사실
1-5-4	중부권 전통시장 개설	2015~ 2018	5,000		5,000	이행후 계속추진 (50%)	여	지역 경제과
1-5-5	암태구간 국도2호선 직선화	2015~	718	18	700	30%	여	안전 건설과
1-6-1	남부권 신해상교통망 구축	2015~ 2016	5,000	5,000		완료	여	도서 개발과
1-6-2	북부권 신해상교통망 구축	2015~ 2017	1,300	550	750	완료	여	도서 개발과

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			추진율 (%,임기내 계획량대비 공정률)	임 기 내 완료가능 여 부	추 진 부 서
			총사업비	예산확보	향후계획
2	농축산업 경쟁력 강화로 군민 소득향상
2-1-1	농축산업의 경쟁력 강화	2014~ 2018	88,305	88,305		이행후 계속추진 95%	여	친환경 농업과
2-1-2	수산업의 경쟁력 강화	2014~ 2018	25,500	8,300	17,200	이행후 계속추진 95%	여	해양 수산과
2-1-3	친환경 농축산업 연계 관광산업육성	2014~ 2018	3,054	3,054		이행후 계속추진 95%	여	친환경 농업과
2-2	지역 농산물 명품화 부가가치 제고	2014~ 2018	10,780	10,125	655	이행후 계속추진 95%	여	친환경 농업과
2-3	천일염명품화를 통한 경쟁력 확보	2015~ 2018	16,300	16,300		이행후 계속추진 (95%)	여	특산물 유통 사업소
2-4	해상교통 보조금 지원제도 개선	2015~ 2016	600	300	300	완료	여	도서 개발과
3	관광‧문화‧환경의 발전
3-1-1	도서식생생태공원	2015~ 2018	15,050	15,050	0	이행후 계속추진 (80%)	여	환경 녹지과
3-1-2	신안연예인예술마을조성	2015~ 2017	13,500		13,500	이행후 계속추진 (30%)	부	지역 경제과
3-1-3	신안문화예술회관 건립	2016~	7,100		7,100	50%	부	문화 관광과
3-1-4	국립 해양유물 전시관 유치	2017~ 2020	8,000		8,000	40%	부	문화 관광과
3-1-5	수산물유통 물류센터 건립사업	2013~ 2016	3,000	3,000		완료	여	특산물 유통 사업소
3-1-6	해안모실길조성	2012~ 2021	6,200	3,660	2,540	이행후 계속추진 (85%)	여	환경 녹지과
3-1-7	섬 생활사 유물전시관 조성	2014~ 2016				보류	부	문화 관광과
3-1-8	홀리랜드 조성 사업	2017~ 2024	59,200	3,833	55,367	이행후 계속추진 (50%)	부	문화 관광과

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			추진율 (%,임기내 계획량대비 공정률)	임 기 내 완료가능 여 부	추 진 부 서
			총사업비	예산확보	향후계획
3-1-9	이순신장군 역사기록재현사업	2015~ 2017	170	170		이행후 계속추진 (80%)	부	문화 관광과
3-1-10	유배문화 역사관건립	2018~ 2020	8,000		8,000	30%	부	문화 관광과
3-1-11	관광 인프라 구축을 통해 지역경제 활성화	2009~ 2020	704,300	41,500	662,800	이행후 계속추진 (65%)	여	흑산공항중신권 개발단
3-2-1	항로가시권경관조성	2015~ 2018	1,000	1,000	0	완료	여	환경 녹지과
3-2-2	체류형 관광코스 개발	2016~	2,540	2,072	468	완료	여	문화 관광과
3-2-3	신안 중남부권 관광 연륙교 계획	2015~	227,850	1,350	226,500	30%	부	안전 건설
3-3-1	지속가능한 대표축제 개발	2016~	250	150	100	완료	여	문화 관광과
3-3-2	수산물 별미축제 정비	2015~ 2016	20	20		완료	여	해양 수산과
4	신뢰받는 행정으로 군민 대통합
4-1-1	종합복지센터 건립	2014~ 2016	5,040	4,723	317	완료	여	주민 복지과
4-1-2	신안군 종합복지관 설립	2016~2020	18,654	10,354	8,300	이행후 계속추진 (70%)	부	문화 관광과
4-1-3	종합체육시설 복합복지공간 활용	2008~	9,875	7,803	2,072	이행후 계속추진 97%	여	문화 관광과
4-2-1	귀농·귀촌 안정적인 정착지원	2014~	2,150	1,236	914	이행후 계속추진 95%	여	농업 기술센터
4-2-2	장애인복지대책 강화	2014~ 2018	2,656	2,177	479	완료	여	주민 복지과
4-3-1	명문학교 육성 지원	2014~ 2017	12,865	8,732	4,133	완료	여	행정 지원실
4-3-2	다문화가정 사회참여 프로그램 운영	2014~ 2018	75	18	57	완료	여	주민 복지과
4-3-3	평생교육 활성화	2016~ 2017	358	186	172	완료	여	행정 지원실

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			추진율 (%,임기내 계획량대비 공정률)	임 기 내 완료가능 여 부	추 진 부 서
			총사업비	예산확보	향휴계획
5	투명한 행정 구현
5-1-1	책임지는 신뢰행정 구현으로 융합시대 창조	2015~ 2016				완료	여	세무 회계과
5-1-2	군민 주권 우선 융합시대 창조	2015~				완료	여	행정 지원실
5-2	투명하고 공정한 인사운영	2015~				완료	여	행정 지원실

1-1	모든 유관기관의 관내이전 추진

기획홍보실 / 실장 황광연 / 기획의회담당 김명렬 / 담당자 김명렬(240-8205)

군청사 이전과 함께 기획했던 수협, 선관위, 교육청, 산림조합 등 모든 유관기관의 관내 이전을 통하여 도시개발을 촉진한 군민 편익 증진

□ 사업개요

○ 모든 공공유관기관 관내 이전 추진 목표 : 8개 기관

․ 경찰서, 선거관리위원회, 교육청, 법원, 한국국토정보공사, 수협, 산림조합, 국민건강보험공단

□ 지금까지 추진상황

○ 유관기관 유치 완료 : 5개 기관

- 한국국토정보공사 신안지사

- 국민건강보험공단 신안지사

- 신안경찰서

- 신안수협

- 신안군산림조합

○ 유관기관 유치 추진체계 구축

․ 신안군 유관기관단체 유치위원회 운영조례 제정 완료

․ 제20대 국회의원선거 후보 공약 자료제공

- 신안경찰서, 신안군법원, 신안교육청, 신안수협

○ 「신안군 유관기관단체 유치위원회」구성

- 구  성 : 40명 내외 (위원장 1, 부위원장 2, 위원 37)

- 임  무 : 다양한 유치방안 및 행․재정적 인센티브 제공방안 마련

- 소요예산 : 20,000천원(위원회 참석수당 및 여비, 활동비)

○ 총괄기획 및 조정을 담당하는 행정지원 T/F팀 구성 : 3명

- 행정담당(총괄), 기획의회담당, 재산관리담당

○ 유관기관단체 담당 부서별 실․과장 책임제 운영

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
		80

□ 향후 추진계획

○ 유관기관 유치활동 : 연중

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 50백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	50			50		50			50
2014
2015
2016	10			10		10			10
2017	20			20		20			20
2018.6	20			20		20			20
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1-2	십자형 도로망 구축 경제발전 선도

도서개발과 / 도서개발과장 송광민 / 교통행정담당 김영택 / 담당자 박형준(240-8967)

신안군 전 관내가 소통되는 십자형 도로망을 구축하여 군민과 관광객이 목포를 경유하지 않고 자유롭게 관내 이동이 가능하도록 증도~자은간 교량 건설 시까지 철부선을 투입하여 섬간 원활한 해상교통망 구축.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 증도-자은간 여객선 건조 사업

○ 추진기간 : 2015. 9월 ~ 2016. 7월

○ 사 업 비 : 3,500백만원 (여객선 건조비용 3,477백만원)

○ 사 업 량 : 250톤급 관광형 여객선(차도선) 1척

- 여객정원 : 150명

- 차량적재 : 승용차 20대

□ 지금까지 추진상황

○ 2015.  3. 27. : 증도↔자은 간 여객선 건조사업 추진계획수립

○ 2015.  6.  2. ～ 7. 13. : 제안공모(협상에 의한 계약)

○ 2015.  6.  5. ～ 9.  1. : 타당성조사 용역

○ 2015.  7. 17. : 공유재산 관리계획심의(군의회 의결)

○ 2015.  7. 24. : 제안서 평가 및 협상적격자 선정

○ 2015.  9. 21. : 여객선 건조 계약(장보고조선 대표 이은영)

○ 2015. 12.  8. : 내항여객운송사업 항로고시(해양수산부 고시 제193호)

○ 2015. 12. 28. : 여객선건조 책임감리용역 계약

○ 2016.  1. 14. : KST(선박안전공단) 도면승인

○ 2016.  2.  1. : 여객선 선박 승무원 및 사무원 채용 의뢰(행정지원실)

○ 2016.  2. 12. : 해상여객운송사업 면허 신청(목포지방해양수산청)

○ 2016.  3. 17. : 해상여객운송사업 신규 사업자(신안군수)로 선정

○ 2016.  4. 14. : 해상여객운송사업 면허 신청

○ 2016.  5. 22. : 해상여객운송사업 면허 수리

○ 2016.  7. 16. : 여객선 건조 준공

○ 2016.  8. 26. :「섬들의고향1호」취항식

○ 2016.  9.  1. ~ :「섬들의고향1호」운항개시

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100

□ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음.

□ 향후 추진계획

○ 여객선 운항 지속 추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	5,200			5,200		3,700			3,700
2014
2015	3,500			3,500		3,500			3,500
2016	200			200		200			200
2017	500			500
2018.6	500			500
임기후	500			500

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1-3	십자형도로망 구축으로 경제발전 선도

안전건설방재과 / 과장 박종원 / 도로시설담당 천중영 / 담당자 정원중(240-8471)

신안군 전 관내가 소통되는 십자형 도로망 구축으로 군민과 관광객이 목포를  경유하지 않고 자유롭게 관내 이동이 가능하도록 도로망 구축

□ 사업개요

(단위:억원)

연번	사 업 명	노선명	사업량	사업비	사업기간	비 고
	5개 지구			13,996
1	암태~압해 도로건설 (새천년대교)	국도2호선	L=10.8km	5,615	2010.09.15 ~ 2018.08.05
2	지도~임자 도로건설 (임자대교)	국도24호선	L=4.99km	1,676	2013.10.28 ~ 2020.09.20
3	추포~암태 도로건설	국도2호선	L=1.82km	258	2016.04.22 ~ 2022.04.22
4	비금~추포 연도교 건설	국도2호선	L=6.2km	4,052	타당성재조사 완료
5	증도~자은 연도교 건설	지805호선	L=5.98km	2,395	기본계획 완료

□ 지금까지 추진상황

○ 암태~압해 도로건설 : 주탑, 케이블 연결․교량 상부공 시공 (종합진도 80%)

- 2017년 예산 988억원 반영

○ 지도~임자 도로건설 : 주탑 및 상부공 시공(종합진도 53%)

- 2017년 예산 296억원 반영

○ 추포~암태 도로건설 : 교량하부공사(코핑작업) (종합진도 26.3%)

- 2017년 예산 70억원 반영

○ 비금~추포 연도교 건설 : ‘14. 04월 타당성재조사 완료(B/C=0.4, AHP=0.416)

○ 증도~자은 연도교 건설 : ‘14. 12월 기본계획수립 용역 완료(B/C=0.35)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
-	90%	-	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 추포~비금 연도교 건설

- 2012년 예비타당성조사를 실시, 2013년 국회에서 실시설계 용역비 30억원을  반영하여 추진하던 중 신안 조선단지 착공이 지연되고 교통 수요가 적다는  이유 등으로 타당성재조사 결과 추진 보류

- 증도~자은 여객선 운항 및 소형공항 개항 등의 여건변화를 고려하여  예비타당성조사가 될 수 있도록 지속 건의

※ 대안노선 검토

□국도2호선(암태~비금구간) 최적경유지 검토 및 군도8호선(안좌 한운~상사치)  도로건설공사 기본계획 및 타당성조사 용역 시행

○ 증도~자은 연도교 건설

- 타당성기준(B/C=1.0이상)에 미달하여 공공투자사업에 대한 예산관리  제도인『예비타당성조사제도와 총사업비 관리지침』상 사업추진이 어려움

- 신안군 관내 중부권 섬과 북부권 섬을 연결하는 현행의 지방도를 국도로 승격하여 국비 지원 확대

▪지방도805호선 상위도로 승격 타당성조사용역 시행

□용역비 : 177백만원, 용역기간 : 2016. 11. ~ 2017. 12.

□ 향후 추진계획

○ ‘17. 06 ~ 07 : 부처별 예산요구안 실무심의(기재부)

○ ‘17. 11 : 정부예산안 국회 제출

○ ‘17. 11 ~ 12 : 국회상임위 예비심사 및 국회예결위 부처별 심사

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 1,173,300백만원 (기투자 금액 364,920백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	1,173,300	1,173,180	120	-	-	470,420	470,300	120	-	-
2014	60,000	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-
2015	76,100	76,100	-	-	-	76,100	76,100	-	-	-
2016	93,420	93,300	120	-	-	93,420	93,300	120	-	-
2017	117,000	117,000	-	-	-	135,400	135,400	-	-	-
2018	136,800	136,800	-	-	-	105,500	105,500	-	-	-
임기후	689,980	689,980	-	-	-	-	-	-	-	-

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

1-4	송공연안항 개발을 재추진

해양수산과 / 해야수산과장 문성칠 / 해양시설담당 조영일 / 담당자 박신영(240-8417)

2018년 새천년대교 개통과 연계하여 기존 목포항으로 통하던 모든 물적· 인적

연안교통체계를 송공항으로 집중시켜 물류비용절감의 극대화와 체계적인 어업

활동을 통해 낙후된 지역경제 활성화 도모를 위해 기반시설을 확충하는데 있음

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 압해 송공지구 공유수면 매립공사(2공구)

○ 위    치 : 신안군 압해읍 송공리(공유수면)

○ 규    모 : 공유수면 매립(A=208,275㎡)

(1공구: 36,101㎡, 2공구: 58,910㎡, 3공구: 113,264㎡)

○ 사 업 비 : 8,100백만원(도급 6,907  관급336  감리 857)

○ 공사기간 : 2016. 07. ~ 2018. 12.

○ 공 정 율 : 70%

□ 지금까지 추진상황

○ ‘08. 04 : 송공지구 공유수면 매립면허 승인

○ ‘10. 04 : 송공지구 공유수면 실시계획 승인

○ ‘13. 07 : 공사 계약 및 착공

○ ‘15. 08 : 공유수면 매립공사 부분준공

○ ‘15. 08 : 공유수면 매립공사 지형도면고시

○ ‘16. 03 : 공유수면 매립공사 실시계획 변경인가 신청

○ ‘16. 06 : 공유수면 매립공사 실시계획 변경인가 승인

○ ‘16. 07 : 공유수면 매립공사 타절 부분준공

○ ‘16. 08 : 공유수면 매립공사(2공구) 실시설계용역 착수

○ ‘16. 12 : 공유수면 매립공사(2공구) 실시설계용역 완료 및 발주

○ ‘17. 03 : 공유수면 매립공사(2공구) 1차분, 2차분 계약

○ ‘17. 06 : 공유수면 매립공사(2공구) 1차분, 2차분 변경계약

○ ‘17. 06 : 공유수면 매립공사(2공구) 1차분 준공

○ ‘17. 06 : 공유수면 매립공사(2공구) 2차분 기성

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	70

□ 문제점 및 대책

○

□ 향후 추진계획

○ ‘17. 12. : 공유수면매립공사(2공구) 2차분 준공

○ ‘18. 12. : 공유수면 매립공사 준공 예정

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 8,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	대물	합계	국비	도비	군비	대물
합계	8,100			8,100		7,129			7,129
2016	1,000			1,000		1,329			1,329
2017	3,000			3,000		3,500			3,500
2018.6	4,100			4,100		2,300			2,300
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1-5-1	국립 섬 발전 진흥원 유치

도서개발과 / 도서개발과장 송광민 / 도서개발담당 송현중 / 담당자 김병수(240-8483)

새천년대교 시대를 대비하여 중부권에 국립 섬 발전 진흥원를 유치하여 우리군 중부권을 전국 섬 개발을 합리적으로 선도할 거점으로 육성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 신안군 일원(중부권 내)

❍ 규    모 : 국가 종합연구기관 및 연구분원

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2022(6년)

❍ 사 업 량 : 진흥원 건립 등 2개동 및 부지조성(5,000㎡)

❍ 사 업 비 : 약 750억원

❍ 주관기관 : 국립목포대학교(도서문화연구원)

❍ 참여기관 : 전라남도, 기초지자체(10), 한국해양수산개발원

국립해양박물관, 한국해양과학기술원, 국립해양문화재연구소등

□ 지금까지 추진상황

❍ 2016. 01 : ‘17년 국고 신규사업 발굴(전라남도)

❍ 2016. 02 : 국립 「섬 발전 진흥원」 설립 지원 건의

• 전라남도 → 행정안전부

❍ 2016. 07 : 국립 「섬 발전 진흥원」 연구기관 협의(목포대학교)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
		30

□ 문제점 및 대책

❍ 낙후 지역 지자체 발전기회 도래에 따른 범정부적 지원유도

❍ 섬을 주제로 건립되는 진흥원의 섬지역 유치 당위성 피력

❍ 섬발전 진흥원 설립건의(2016.02)에 대한 행자부의견

- 섬발전 진흥원은 단기간에 설립이 어려운 실정으로 우선 지방행정 연구원 산하 섬발전센터에서 섬발전 방안 모색 및 법 제도 정비

❍ 도서개발 촉진법 개정 입법 발의된 섬의날 지정 시행령 제정 후 섬의날을 국가기념일로 제정

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 09 : 중앙부처(행정안전부) 지속 협의 실시

❍ 2017. 11 : 행정안전부 및 추진 주요기관 지속적 협의 실시

- 섬발전 진흥원 설립의 당위성, 지원방안 등 관련 중앙부처 지속 협의 실시

❍ 섬의날 지정 시행령 제정 섬의날 행사추진 및 섬발전 진흥원 설립에 관한 구체적 계획 수립 추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계
2014
2015
2016
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

1-5-2	의료기관 유치를 통한 군민의료서비스 개선

보건소 / 보건소장 서정연 / 보건행정담당 정성길 / 담당자 김형하(240-8802)

종합병원(내과·정형외과·치과·한방·물리치료 등)을 유치하여 도서 발전의 틀을 세우고 군민 의료서비스 개선

□ 사업개요

○ 대상지역 : 권역별 4개소(가거도, 홍도, 하의, 암태)

○ 보건지소 기능강화

- 응급실과 진단장비를 갖춘 의원급 응급의료 거점보건지소 확충으로

진료기능 강화

- 지역 종합병원과 원격협진을 통한 환자 진단으로 환자 후송 여부          결정과 응급환자 처치 및 후송체계 개선

○ 재    원 : 농특사업비 확보 추진

□ 지금까지 추진상황

○ 의원급 보건지소 신축사업

- 2016. 11월 : 농특사업 추진 사항 중앙부처 협의 방문

- 2016. 12월 : 농특사업 추진

- 2017. 3~6월 : 4개소에 대한 입찰 및 착공

[가거도]

- 2016.  8월 : 실시설계 입찰

- 2016. 12월 : 보건지소·해양보호구역관리센터 연계 건립할 부지의                      소유자와 매입 협의 완료

- 2017.  4월 : 기본설계심의 완료(보건복지부 한국건강증진개발원)

- 2017.   5월 : 실시설계 완료

- 2017.   6월 : 가거도 기능확대형보건지소 및 해양보호구역관리센터

시설공사 입찰 및 착공

- 2017.  11월 : 철근콘크리트 공사 추진 중(1층 완료)

※ 2018.  3월 : 준공 예정

[홍  도]

- 2016. 12월 : 전라남도 계약심사 완료

- 2016. 12월 : 기본설계심의 완료(보건복지부 한국건강증진개발원)

- 2017.  3월 : 실시설계 완료

- 2017.  4월 : 홍도기능확대형보건지소 시설공사 입찰 및 착공

- 2017. 11월 : 철근콘크리트 공사 완료(마감 공사 중)

※ 2018.  3월 : 준공 예정

[하  의]

- 2016. 12월 : 전라남도 계약심사 완료

- 2016. 12월 : 기본설계심의 완료(보건복지부 한국건강증진개발원)

- 2017.  3월 : 실시설계 완료

- 2017.  4월 : 홍도기능확대형보건지소 시설공사 입찰 및 착공

- 2017. 11월 : 철근콘크리트 공사 완료(마감 공사 중)

※ 2018.  2월 : 준공 예정

[암  태]

- 2016. 11월 : 실시설계 입찰

- 2017.  3월 : 기본설계심의 완료(보건복지부 한국건강증진개발원)

- 2017.  4월 : 실시설계 완료

- 2017.  5월 : 암태기능확대형보건지소 시설공사 입찰 및 착공

- 2017. 11월 : 철근콘크리트 공사 완료(마감 공사 중)

※ 2018.  2월 : 준공 예정

○ 지역 종합병원과 원격협진

- 2016. 04월 : 신안군·한국병원 의료협력협약 체결

- 2016. 04월 : 신안군·KT·중앙병원 업무 협약 체결

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	90

□ 문제점 및 대책

○ 전국 최초 사업임을 감안할 때 금년 상반기 중에 착공되어야 하나

신안군 종합복지타운 조성 계획 및 토지매입에 따른 소유자와의

매입협의 등으로 지연 됨

○ 홍도는 관광지로 잦은 민원이 야기되어 공사 지연(야간에만 공사 진행)

○ 기능확대형보건지소 충원될 직원숙소 확보 필요

□ 향후 추진계획

○ 하의도, 암태도 2018년 2월 공사 준공 예정

○ 가거도, 홍도 2018년 3월 공사 준공 예정

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 11,808만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	11,808	8,266	1,771	1,771		10,778	7,216	1,781	1,781
2014						3,536	2,358	589	589
2015	11,808	8,266	1,771	1,771		7,242	4,858	1,192	1,192
2016
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1-5-3	중부권 종합이동민원실 개설

민원봉사실 / 종합민원담당 노민기 / 담당자 유재희(240-8200)

새천년대교 개통시대를 대비, 중부권역 적극개발과 관련하여 제증명 및 복합민원 처리 지원을 위한 종합 이동민원실을 개설

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 찾아가는 종합 이동민원실 운영

○ 사업기간 : 2015. 6 ~ 새천년대교 개통시 까지

○ 사업대상 : 14개 읍·면

○ 참여기관 : 5개 기관 10명

⦁ 유관기관(4) : 대한법률구조공단, 건강보험공단, 지적공사, 법무사

⦁ 군    청(6) : 종합민원담당, 복합민원담당, 지적담당, 건축담당,

수산민원담당, 산림보호담당

○ 추진내용

⦁ 인허가·수산민원, 지적, 건축, 부동산 등 각종민원 접수 및 처리

⦁ 법률, 의료·건강보험, 등기상담 및 민원안내

□ 지금까지 추진상황

▷ 임기내 추진할 사업량 대비 종합진도율 : 100%

○ 복합민원 처리 전담부서 설치 완료 : 2015. 02. 27

○ 찾아가는 종합 이동민원실 계획수립 : 2015. 05. 20, 2016. 05. 27

○ 2015년 6월 ~ 2016년 12월 종합이동민원실 운영

: 9회(암태, 비금, 임자, 하의, 도초, 흑산, 장산, 지도, 안좌)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100%

□ 향후 추진계획

○ 2018년 찾아가는 종합 이동민원실 운영

월 별	2월	3월	4월	5월	6월	비고
장 소	하의	도초	지도	안좌	장산
대상읍면	하의 신의	비금 도초	지도 증도 임자	자은 안좌 팔금 암태	장산

○ 장기적 계획 : 신안군 종합복합타운 건설 후 중부권 종합이동민원실

출장소 설치

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 :  40백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	40			40		23.5			23.5
2014
2015	10			10		10			10
2016	10			10		10			10
2017	10			10		3.5			3.5
2018.6	10			10
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1-5-4	중부권 전통시장 개설

지역경제과 / 과장 박성호 / 지역경제담당 김영희 / 담당자 박배선(240-8335)

새천년대교 개통(2018년)으로 접근성이 대폭 개선된 중부권 일원에 주변 관광자원과  연계·특화하는 문화관광형 전통(수산물)시장 및 로컬푸드 판매장 육성사업 추진 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015 ～ 2018 (4년간)

○ 사업대상 : 중부권 일원

○ 사 업 량 : 전통(수산물)시장 개설 1개소

○ 사 업 비 : 50억원(국비 25, 지방비 25)

□ 지금까지 추진상황

○ 타당성 및 기본계획 수립 용역 : 2016. 11. ～ 2017. 12.

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	50

□ 문제점 및 대책

○ 전통시장 단독으로 사업시행하기에는 중소기업청으로부터 지원조건이 안되어 해양수산과 해양복합공간 사업 및 농업기술센터 특색있는 먹거리개발 사업과 연계하여 추진코자 함.

(전통시장 지원조건 : 『전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 시행령』 제2조(전통시장의기준) 4항 1호 신청일 당시부터 과거 10년 이상 시장의 기능을 행하였다고 인정되는 곳)

□ 향후 추진계획

○ 2016. 10. ～ 2017. 12. : 타당성 및 기본계획 수립 용역

○ 2017.  3. ～        : 국비 현안사업 건의 및 확보(해양수산과)

※ 해양복합공간사업비 건의

○ 2017. 4. ～ 2017. 12. : 장소 결정 및 토지 매입, 인허가 절차 진행

○ 2018. 1. ～          : 사업추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	5,000	2,500		2,500
2014
2015
2016
2017
2018.6	5,000	2,500		2,500
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1--5-5	암태구간 국도2호선 직선화

안전건설방재과 / 과장 박종원 / 도로시설담당 천중영 / 담당자 정원중(240-8471)

암태구간 국도2호선 직선화 사업 시행으로 섬주민 및 관광객 교통 불편 해소

□ 사업개요

○ 노 선 명 : 국도2호선(신안~부산)

○ 위    치 : 신안군 암태면 신석리 ~ 기동리

○ 사 업 량 : 4.0km(길어깨 포장, 굴곡부 개량 5개소)

○ 사 업 비 : 70억원

□ 지금까지 추진상황

○ 2015. 03 : 암태구간 직선화 기본조사용역 완료

구 분	1안	2안	3안
내 용	▪ 위치 : 신석리~단고리 ▪ 사업량 : L=6.81km (매립 A=2,240,000㎡) ▪ 사업비 : 3,736억원	▪ 위치 : 신석리~단고리 ▪ 사업량 : L=7.18km (매립 A=1,349,000㎡) ▪ 사업비 : 2,385억원	▪ 위치 : 신석리~단고리 ▪ 사업량 : L=6.22km ▪ 사업비 :180억원

- ①, ②안은 공유수면 매립 기본계획 반영부터 준공까지 향후 13년~18년이  소요될 것으로 예상되어 사업착수 및 경제적 측면에서 유리한 ③안  으로 반영하여 추진

○ 2016. 05 : 국토부, 익산청, 광주국토관리사무소 방문 건의

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
-	-	30%	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 신석~기동구간은 미개통 구간으로 관리청 미지정되어 위험도로 개량6단계 기본계획에 미반영(도로법 시행령상 일반국도로 국토부가 관리청이나 도서로 형성되어 전남도가 관리청이라는 입장 견해차 발생)

○ 새천년대교 개통 이후는 익산청에서 직접관리 예정이오니 우선 위험도로 개량 6단계 기본계획(‘18~’22) 반영 건의

□ 향후 추진계획

○ 2016. 11 ~ 2017. 12 : 제6차 위험도로 개량 5단계(‘18~’22) 기본계획 용역

(국토교통부 첨단도로안전과)

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 718백만원 (기투자 금액 0백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	718	700	-	18	-	18	-	-	18	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	18	-	-	18	-	18	-	-	18	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018.6	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1-6-1	남부권 신해상교통망 구축

도서개발과 / 도서개발과장 송광민 / 교통행정담당 김영택 / 담당자 박형준(240-8967)

하의~신의~장산 권역에 맞춤형 선박 취항을 통해 새로운 해상교통망을 구축하여 여객 편의시설 및 승객안전을 확보.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 남부권(하의▪신의▪장산)여객선 건조 사업

○ 추진기간 : 2015. 9월 ~ 2016. 7월

○ 사 업 비 : 10,000백만원(군비 50%지원)

○ 사 업 량 : 차도선형 여객선 2척(368톤 1척, 486톤 1척)

□ 지금까지 추진상황

○ 2015.  9. 14 : 남신안농협 여객선건조사업 추진계획수립

- 남신안농협 1,2호 선박건조지원

- 총사업비 100억원중 군비 50억원지원

○ 2015.  9. 23 : 남신안농협 여객선 건조사업비 지원(10억원/총50억원)

○ 2016.  3. 29 : 남신안농협 여객선 건조사업비 지원(20억원/총50억원)

○ 2016.  5. 23 : 남신안농협 여객선 건조사업비 지원(10억원/총50억원)

○ 2016. 12. 14 : 남신안농협 여객선 건조사업비 지원(5.4억원/총50억원)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100				잔액 : 4.6억

□ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음.

□ 향후 추진계획

○ 2016. 7. 15  : 남신안농협 여객선 건조사업 완료

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	5,000			5,000		5,000			5,000
2014
2015	1,000			1,000		1,000			1,000
2016	4,000			4,000		4,000			4,000
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

1-6-2	북부권 신해상교통망 구축

도서개발과 / 도서개발과장 송광민 / 교통행정담당 김영택 / 담당자 박형준(240-8967)

매화-고이-소악-기점-병풍-마산-선도를 잇는 해상교통망은 군·선사·주민과 협의하여 효과적인 선박을 투입하고, 지도 송도 항로를 신설하여 주민 불편을 해소하고 소득향상을 도모.

□ 사업개요

○ 북부권 낙도항로(송공-신월) 해상교통 획기적 개선 주민불편 해소

○ 운항노선 분리 및 대체선박 투입으로 효율적 운항노선 운영

□ 지금까지 추진상황

○ 여객선 항로 개선 방안 합의 (‘16년 2월)

- 더존페리 3호(88톤) 대체할 선박(160톤급) 건조 합의

- 대체 선박 건조 후 항로 개선 합의

※ 송도~병풍(4회) 송도~신월(1회) ⟹ 송도~신월(4회)

○ 더존페리 3호(88톤) ⟹ 더존페리 2호(167톤) 선박 교체 운항(`16년 12월)

○ 내항여객선 운항계획 변경완료(`17년 2월)

※ 송도~병풍(4회) 송도~신월(1회) ⟹송도~병풍(2회) 송도~신월(3회)

완 료(%)	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100

□ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음.

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	1,300			1,300		1,150			1,150
2014
2015
2016	250			250		250			250
2017	350			350		300			300
2018.6	350			350		300			300
임기후	350			350		300			300

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

2-1-1	농축산업의 경쟁력 강화

친환경농업과 / 과장 유재석 / 친환경농업담당 장춘태 / 담당자 정신욱(240-8376)

농축산업의 경쟁력 강화를 위해 읍‧면별 새로운 소득 작목을 개발, 브랜드화 하고,    생산·가공·유통·판매 등 체계적인 지원시스템을 구축하여 농가 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 압해읍 등 14읍면

○ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

○ 사 업 량 : 5개분야, 친환경농업 생산기반조성 등 33사업

○ 사 업 비 : 88,305백만원

○ 주요 사업내용

- 친환경농업 생산기반조성 : 3,865ha, 48,950백만원

- 원예특화작목육성 : 17개사업, 10,780백만원

- 농산물 유통기반구축 : 5개사업, 4,655백만원

- 농식품 가공산업 및 향토산업 육성 : 5개사업, 5,550백만원

- 축산기반조성 및 브랜드화 : 5개사업, 18,370백만원

□ 지금까지 추진상황

○ 친환경농업육성 5개년계획(‘16~’20)수립 추진 : ‘16. 5월

○ 친환경농업 생산기반 확충으로 고품질 농산물 생산 경쟁력 강화

- 친환경농산물 인증 : 3,865ha(유기농 522, 무농약 3,343)

- 전라남도친환경농업대상 3년연속(‘14년, ‘15년, ’16년)수상 : 상사업비 3.7억원

○ 원예특화작목 생산기반조성(읍·면별 전략 소득작목 육성계획 추진)

- 주력작목 : 시금치(비금, 도초), 꾸지뽕(전읍면),

- 부주력작목 : 무화과(압해읍), 단호박(북부권), 생강(중부권), 백향과(남부권)

- 기타작목 : 아로니아, 세발나물, 브로콜리, 등

○ 농식품 가공산업 및 향토산업 육성 등 6차산업 추진

- 지도 함초, 팔금 꾸지뽕, 자은 땅콩, 안좌 잡곡 등 6차산업 경영체 양성

- 팔금 꾸지뽕 향토산업 육성사업 공모 선정 : 국비 등 30억원 확보

○ 친환경 축산기반조성 및 브랜드화로 경쟁력 강화

- AI,구제역 예방대책 수립, 방역대책 재난 상황실 운영

- 구제역등 가축 전염병 예방을 위한 정기 예방접종 : 연 3회

- 무허가 축사 적법화를 위한 홍보 및 교육 실시 : 5회

- 친환경 축산물 인증 : 92농가

○ 추진이행률

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
-	95		-	-

□ 문제점 및 대책

○ 정부 보조사업에 대한 의존도가 높고 사업추진 후 성과 미흡

- 보조사업 성과 분석을 통해 경쟁력 있는 작목 중심으로 지원

○ 영농일지 작성 미이행, 제초제‧농약‧화학비료 사용 등으로 친환경농업 인증취소 사례 빈발

- 친환경농업 정기적인 농가교육 실시로 인증취소 사례 예방 및 친환경 인증확대 유도

□ 향후 추진계획

○ 친환경농업 육성 5개년 계획수립에 따라 연차별 지원계획 수립 추진

- 친환경농법 실천교육 집중‧지속‧반복적 실시 : 연4회(분기별 추진)

○ 읍면별 전략소득작목 생산기반 구축 브랜드화

- 대파, 양파, 시금치 등 특화작목 들녘별 경영체 육성 : 3개소

○ 과수, 채소 등 우수농산물 GAP인증 확대추진 브랜드화

- 배, 무화과, 포도, 시금치, 대파, 양파, 마늘 등

○ 신안 꾸지뽕 가공기반구축을 통해 6차산업 표준모델사업으로 육성

- 성분분석, 제품개발, 특허출원, 지리적표시 등록, 홍보 마케팅 등

○ 친환경축산물 생산기반 구축을 통해 경쟁력 강화

- 친환경 축산인증, 방역사업, 조사료 생산확대, 축사시설현대화 등

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 88,305백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	88,305	25,197	12,575	50,533	0	88,305	25,197	12,575	50,533	0
2014	13,425	3,355	1,668	8,402		13,425	3,355	1,668	8,402
2015	17,501	4,969	2,580	9,952		17,501	4,969	2,580	9,952
2016	18,470	5,414	2,674	10,382		18,470	5,414	2,674	10,382
2017	19,130	5,702	2,774	10,654		19,130	5,702	2,774	10,654
2018.6	19,779	5,757	2,879	11,143		19,779	5,757	2,879	11,143
임기후

임기내 (2018. 6월까지) 완료 가능 여부	여

2-1-2	수산업 경쟁력 강화

해양수산과 / 해양수산과장 문성칠 / 수산진흥담당 박치혁 / 담당자 신상수(240-8403)

수산 산업의 경쟁력 강화를 위해 중장기 계획을 수립 브랜드개발∙품질향상∙홍보∙유통∙판매∙고객관리 등 체계적 지원시스템을 구축 수산 산업의 안정적 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 사업장소 : 신안군 일원

○ 사업기간 : 2014 ~ 2018(5년)

○ 사 업 비 : 25,500백만원(국비 30%, 도비 15%, 군비 15%, 자담 40%)

▪ 임기 내 18,000백만원

○ 사업내용

▪ 대안품종 연구 및 지원(시험연구소, 양식 시범사업 등)

▪ 김․왕새우 양식의 저장․가공시설 현대화 및 산업화

▪ 신안 뻘 낙지 등 신안 토종 수산자원조성 및 보호 관리 등

□ 지금까지 추진상황

○ 전략 육성품종(김, 낙지) 선정 및 중장기 투자계획 수립완료

○ 2016. 신규 양식품종 발굴 및 친환경양식어업 육성사업 추진

▪ 주민참여형 갯벌굴 양식 시설사업 : 10억원

▪ 김 종묘안정화 사업 : 10억원

○ 2016년 수산종묘배양장 시설사업(2016 ~ 2017) : 19억원

○ 2017년 무감염 새우 종묘배양장 시설사업비 확보 : 14억원

○ 연안 갯벌어장 내 낙지자원 보호대책 수립 추진

▪ 낙지자원 조성을 위한 어린낙지 방류(24,800미) : 2005년 ~ 2015년

▪ 신안 낙지 브랜드화를 위한 BI개발 디자인 출원등록 완료(18백만원) : 2016년 12월 완료

※ 전남도 낙지금어기 설정 고시(2016. 05월) : 06.21 ~ 07. 20

▪ 신안 뻘낙지 목장화 시범지구 운영 : 시험포 조성, 어린낙지 방류, 자원발생량 조사

- 안좌 존포지구(12ha), 지도 선도지구(3ha), 장산 오음지구(10ha)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	95

□ 문제점 및 대책

○ 갯벌낙지의 자원조성을 위한 인프라 및 제도개선 및 브랜드 개발의 한계

▪ 낙지 양식 및 어린낙지 방류방법 개선을 위한 기술개발의 한계

▪ 갯벌어장의 지선민에 대한 권리주장의 법적 효력 한계(기관별 견해차이)

▪ 관내 낙지브랜드 가치창출의 한계(주요 브랜드의 인접시군 선점)

□ 향후 추진계획

○ 신안 뻘낙지 자원조성 및 브랜드 가치제고 등을 위한 연구소, 위판장 등 시설

▪ 다기능 위판장 시설사업 확정 : 50억원(2017년 ~ 2018년/1차년도 6억원)

○ 갯벌 유용자원 조성 및 기반시설 확충을 통한 어업인 소득창출 모색

(해수부 공모사업 선정에 따른 사업추진)

▪ 갯벌형 연안바다 목장조성 : 50억원(2017년 ~ 2021년/매년 10억원)

○ 수산물 저장시설 현대화 추진(국비, 지특)

▪ 양식수산물 공동저온저장 시설사업 : 10억원

○ 친환경 양식어업 육성지원 예산확보(해수부 공모사업 응모) : 60억원

▪ 바이오플락 친환경 새우양식장 조성 : 3.6억원

▪ 다목적 어류양식장 조성(우럭치어 중간육성장) : 20억원

○ 연안 갯벌어장 내 낙지자원 보호를 위한 관리계획 추진

▪ 낙지 불법 포획 외지어선(어업인) 지도․단속 : 연중

▪ 낙지브랜드 개발 및 관내 낙지유통을 위한 마케팅 전략 수립

▪ 낙지자원 조성을 위한 방류사업 추진 : 매년(‘16년, 15백만원 등)

▪ 수산자원관리수면 지정신청완료(안좌 반월지구 2,631ha)

- 압해, 하의, 장산 수산자원관리수면 지정신청을 위한 연구용역 실시

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 25,500백만원 (기투자 금액 3,000백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	25,500	9,450	0	9,450	6,600	8,300	2,950	0	3,050	2,200
2014
2015	3,000	1,100		1,100	800	3,000	1,100		1,100	800
2016	3,000	1,100		1,100	800	3,000	1,000		1,100	800
2017	5,100	1,950		1,950	1,200	2,300	850		850	600
2018.6	9,400	3,200		3,200	3,000
임기후	5,000	2,100		2,100	800

임기내 (2018. 06월 까지) 완료 가능 여부	여

2-1-3	친환경 농축산업 연계 관광산업 육성

친환경농업과 / 과장 유재석 / 농업정책담당 이시영 / 담당자 백하승(240-8373)

친환경 농·축산업을 연계한 관광산업 육성으로 농촌경제 활성화 및 6차산업화로    부가가치 창출하여 농가 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 압해읍 등 14읍면

○ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

○ 사 업 비 : 3,054백만원

○ 사업내용

- 농촌체험․휴양마을 운영지원(체험마을 활성화) : 482백만원

- 관광축산농장 조성(승마체험 확대 및 승마단 육성) : 396백만원

- 농어촌 민박사업 확대운영 : 19백만원

- 경관작물재배 확대(항로가시권 경관작물 재배) 등 : 2,157백만원

□ 지금까지 추진상황

○ 농촌체험·휴양마을 운영지원 : 5개소

- 압해 용마을, 지도 내양녹색체험마을, 흑산 영산도 명품마을

자은 둔장마을, 임자 진리마을

○ 경관작물재배 확대 : 366ha(지도, 증도, 임자, 압해, 비금)

○ 항로가시권 경관작물 재배 : 12ha(지도, 팔금, 임자, 암태)

○ 유소년 승마단 육성 : 1개소(임자초등학교)

○ 초·중·고등학생 승마체험지원  : 232명(지도, 증도, 임자)

○ 추진이행률

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
-	95		-	-

□ 문제점 및 대책

○ 지역특성에 맞는 체험프로그램 부족 및 경관작물 다양성 부족

- 체험프로그램 컨설팅 지원을 통해 지역 특성에 맞는 프로그램 개발

- 구절초, 안개초, 메밀 등 경관작물의 다양화로 체험·휴양마을 주변 볼거리 제공

□ 향후 추진계획

○ 농촌체험·휴양마을 확대 : ‘17) 5개소 → ‘18) 7개소(증도, 암태)

○ 농어촌 민박사업 확대 운영 : ‘16) 324개소 → ‘18) 700개소

○ 경관작물재배 확대 : 476ha(지도읍, 증도면, 임자면, 팔금면, 비금면, 등)

○ 마필산업 육성 및 승마단 운영 : 1개소(임자면)

○ 로컬푸드(친환경농수축산물) 판매장 설치 운영 : 1개소(암태면)

○ 초·중·고등학생 승마체험 확대 지원 : 지도, 증도, 임자

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 3,054백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	3,054	1,913	315	826	0	3,054	1,913	315	826	0
2014	376	247	21	108		376	247	21	108
2015	572	369	51	152		572	369	51	152
2016	603	383	54	166		603	383	54	166
2017	893	526	128	239		893	526	128	239
2018.6	610	388	61	161		610	388	61	161
임기후

임기내 (2018. 6월까지) 완료 가능 여부	여

2-2	지역농산물 명품화로 부가가치 제고

친환경농업과 / 과장 유재석 / 식품산업 박수정 / 담당자 강선희(240-8957)

읍면별 전략 소득특화 작목의 품질관리를 강화하고, 고급화와 차별화를 통한

고부가가치 지역농산품 발굴 명품화 추진

□ 사업개요

○ 사업위치 : 압해읍 등 14읍면

○ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

○ 사 업 비 : 10,780백만원

○ 사업내용 : 생산·가공시설, 기자재, 브랜드 개발 및 육성, 마케팅 지원 등

○ 선정방법 : 관내 지역적 특색과 높은 고수익으로 명품화 가능한 품목

※ 특화작목은 반드시 신안군 농수특산물 품질보증 획득 유도

□ 지금까지 추진상황

○ 권역별 특화작목 시금치 외 5개품목 선정 : ‘16. 10월

○ 특화작목 생산자단체 조직을 위한 회의 및 농가 교육 실시 : 4회

○ 특화작목 사업비 투자(‘14 ~ ’16) : 4,941백만원

- 특화작목 인프라구축, 포장재 지원, 생력 농기계지원 등 3개 사업

○ 농산물우수관리(GAP) 인증 추진 : 배 외 5개품목 126ha

○ 주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 추진 : 392점/827호/783ha

○ 신안군 농수특산물 품질보증 위원회 설치 운영규정 마련 : ‘16. 4월

○ 신안군 농수특산물 품질보증 신청서 접수 : ‘16. 4월말

○ 신안군 농수특산물 상·하반기 품질보증 심의회 개최 : 2회(‘16년)

○ 신안군 농수특산물 상·하반기 품질보증 제품 : 26업체 64제품(‘16년)

○ 신안군 농수특산물 상반기 품질보증 신청 및 홍보 : ‘17. 4월

○ 신안군 농수특산물 상반기 품질보증 심의회 개최 : ‘17. 6월

○ 농산물(시금치·대파)특구지정 :　‘17. 9. 27.(중소벤처기업부)

- 신안 시금치·대파 산업특구(2017 ~ 2021년)

○ 추진이행률

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
-	95		-	-

□ 문제점 및 대책

○ 관내에서 생산되는 농산품의 경우 품목은 다양하나 일부품목을 제외

하면 타시군 농수특산물 대비 생산 및 가격경쟁력이 낮음

- 권역별 생산자단체를 조직하여 특화품목을 적극 육성, 고품질 농산물을 생산하고 군수 품질보증을 통한 농산품 경쟁력 강화

- 품질보증 품목 농산물의 계통출하 및 가공·유통기반 구축 산업화

□ 향후 추진계획

○ 신안군 농수특산물 품질보증 제품 □품질보증서□교부 : 2회(7월, 12월)

○ 신안군 농수특산물 상반기 품질보증 신청 홍보 : ‘17. 9월 5개업체/21제품

○ 신안군 농수특산물 상반기 품질보증 제품 포장재 지원 : ‘17. 9월 ~ 11월

○ 신안군 농수특산물 하반기 품질보증 심의회 개최 : ‘17. 12월

- 매년 상·하반기 신안군 농수특산물 품질보증 위원회 개최

○ 신안군 농수특산물 품질보증 제품에 대한 생산·유통시설 기반 지원 확대

○ 경쟁력 있는 권역별 특화작목 지속 개발 육성

○ 친환경 · GAP 인증품목 지속적 발굴

○ 향토산업 육성사업 등 국비 공모사업과 연계한 식품산업 발굴 육성

○ 농산물(시금치, 대파) 지리적표시 등록 : ‘18. 3월

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 10,780백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	10,780	4,095	776	5,909		10,125	4,095	776	5,909
2014	1,302	275	33	994		1,302	275	33	994
2015	1,059	453	70	536		1,059	453	70	536
2016	2,580	1,032	206	1,342		2,580	1,032	206	1,342
2017	2,950	1,180	236	1,534		2,295	1,180	236	1,534
2018.6	2,889	1,155	231	1,503		2,889	1,155	231	1,503
임기후

임기내 (2018. 6월까지) 완료 가능 여부	여

2-3	천일염 명품화를 통하여 경쟁력 확보

특산물유통사업소 / 소장 박운기 / 농수산물판매담당 전창운 / 담당자 황동식(240-8229)

천일염 명품화를 효율적으로 추진하기 위하여 등급화 수매 · 유통 시스템을

구축하고 브랜드화하여 신안 천일염의 세계적 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 천일염 등급화 및 수매제도 추진에 따른 장기 보관시설 설치

○ 천일염의 수급조절, 품질 고급화 등 체계적인 관리체계 구축

□ 지금까지 추진상황

○ 천일염 명품화를 위한 저장시설 구축

▪ 2015년도 : 6개소(장기 4, 중기 2)

▪ 2016년도 : 3개소(장기 3 / 추진중 1)

▪ 2017년도 : 4개소(장기 2, 중기 2 / 추진중 4)

○ 천일염 유통구조 개선을 위한 노력

▪ 수매사업 추진 및 실무 협의회 개최 : 20회(‘15. 3 ~ ’17. 10)

▪ 수매사업 자금 국비지원건의 : 해수부 건의 6회, 국회 건의 5회 등

▪ 천일염 수매사업 추진

- 2016년 : 총 4만톤 수매완료(군 3, 해양수산부 1)

- 2017년 : 총 4.5만톤 수매계획(신안군 4, 해양수산부 0.5)

※ 2017. 10월말 기준 2.9만톤 수매 완료(연내 1.8만톤 추가 수매 계획중)

○ 천일염 가격 안정화를 위한 용역 추진 : 2017. 08 ~ 11월

▪ 천일염 유통구조 개선 및 정책 발굴을 위한 전문기관 용역 추진

○ 천일염 수출시장 개척을 위한 노력

▪ 2015년 : 중국내 신안 특산물 홍보 및 판매관 개설 운영

▪ 2016년 : 중국 강소성 의정시 등과 천일염 수출 협약 체결

▪ 2017년 : 중국 저장성 및 일본 내 천일염 수출을 위한 업무협약 체결 등

○ 기타 천일염 명품화 및 판매 활성화를 위한 노력

▪ 우수성 홍보를 위한 박람회 참가 : 15회(국내 13, 국외 2) ※중국, 일본

▪ 천일염 판매 확대를 직거래 행사 : 50회(대도시 및 수도권 마케팅)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	95

□ 문제점 및 대책

○ 장기저장시설 건립사업은 해수부의 사업지침변경으로 사업시행이 지연       되었으며, 공사 진행 중 잦은 비로 인해 건축공사 지연

▪ ‘16년 장기저장시설 1개소 : ‘18. 04월까지 완공토록 추진

○ 수매천일염 중국수출은 중국정부의 허가를 받은 염업국, 수출업체 등과       실무협의를 통해 사업 추진(2018년부터 본격적인 수출 추진예정)

▪ 한중 국제정세에 따라 업무협의가 지연되고 있으나 지속적인 노력을 통해 연내 수출이 이루어 질 수 있도록 노력중

□ 향후 추진계획

○ 천일염 수출시장 개척을 위한 업무추진 : 2017. 9 ~ 2018. 6

▪ 수출국내 상표등록 및 온오프라인 판매망 구축

○ 2016년도 천일염 장기저장시설(1개소) 완공 : 2018. 4

○ 2017년도 천일염 중․장기저장시설(4개소) 착공 및 완공 : 2017. 2 ~ 2018. 4

○ 천일염 가격안정화 용역 결과를 토대로 정부 주도하 수매사업 추진 건의 및 수매자금 확보 노력 : 2017. 12 ~ 2018. 6

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 16,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	16,300	4,590	1,677	4,473	5,560	16,300	4,590	1,677	4,473	5,560
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	5,900	1,620	636	2,244	1,400	5,900	1,620	636	2,244	1,400
2016	4,400	1,170	501	969	1,760	4,400	1,170	501	969	1,760
2017	3,000	900	270	630	1,200	3,000	900	270	630	1,200
2018.6	3,000	900	270	630	1,200	3,000	900	270	630	1,200
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

2-4	해상교통 보조금 지원제도 개선

도서개발과 / 도서개발과장 송광민 / 교통행정담당 김영택 / 담당자 박형준(240-8967)

압해도 · 지도 · 증도 주민의 해상교통을 보조금 지원하도록 제도를 개선하여 군민의 재정부담을 줄이고 군민 모두가 형평에 맞는 운임 지원을 받을 수 있도록 함.

□ 사업개요

○ 지도, 압해, 증도주민들까지 여객선 운임지원금 확대

○ 재정 지원을 통한 경제적 부담완화 및 도서간 교류 촉진

□ 지금까지 추진상황

○ 여객선 운임지원 전산시스템 구축

∙ ‘15. 2.  정보화사업 사전 협의 신청 및 보안심사 등(전남도)

∙ ‘15. 3.  행정정보시스템(주민등록 정보제공) 이용 신청

∙ ‘15. 3.  신안군민 여객선 운임 지원 시스템 계약심사 의뢰

∙ ‘15. 3. ∼ ’15. 6.  여객선 운임할인 시스템 개발 및 장비구입

∙ ‘15. 8. 3 ∼ ‘15. 8. 17 신안군민 여객선 운임할인 시범운영

○ 신안군민 여객선 운임지원 개시 : ‘15. 8. 20

∙ ‘15. 8. 3 ~ ’15. 12. 31. 지원금액 : 21백만원(군비)

∙ ‘16. 1. 1 ~ ’16. 11월 현재까지 지원금액 : 90백만원(군비)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100

□ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 지원근거 : 해운법 제44조, 신안군 여객선 운임 지원에 관한 조례

❍ 지원대상 : 지도, 압해, 증도 연륙도서 군민(1만3천명)

❍ 지원내용 : 여객선 일반 운임의 50% 지원

❍ 지원방법 : 군민 인증절차(이용) 후 운임지원(후불)

- 익월 선사 청구에 의해 정산지급((유)신안해운 외 12개선사)

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 :  600백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	600			600		300			300
2014
2015	200			200		200			200
2016	100			100		100			100
2017	100			100
2018.6	100			100
임기후	100			100

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	완료

3-1-1	도서식생생태공원 조성 (신안 도서해양 자생식물 자원 사업)

환경녹지과 / 과장 김동우 / 공원녹지담당 김현채 / 담당자 정지성(240-8452)

도서로 구성된 우리군 고유 향토, 자생식물의 체계적인 보전․육성으로

생물다양성 보전 및 지속가능한 이용기반 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 자은면 백산리 271번지 일원

○ 부지면적 : 33ha

○ 총사업비 : 12,000백만원(국비 6,000, 군비 6,000)

세부사업명	사업비	해당실과	비고
총사업비	120억 (국60, 군60)
① 도서자생식물보전 센터 건립	38억 (국19, 군19)	환경녹지과 (자연환경)
② 신안고둥 전시관 조성	35억 (국17.5, 군17.5)	흑산공항중심권개발단 (중심권기획)
③ 도서지역 식물 자원화 연구 및 보존	32억 (국16, 군16)	농업기술센터 (특화작목)
④ 도서 자생식물 테마 공원조성	15억 (국7.5, 군7.5)	환경녹지과 (공원녹지)

○ 내     용 : 도서생물자원보존 자생색물원 조성

- 도서해양자생식물원, 자생식물 연구⋅조사⋅전시⋅배양실, 체험관, 탐방로, 고둥전시관, 해안방풍림 조성 등

□ 지금까지 추진상황

○ 2015. 09. ~ 11. : 신안 도서해양 자생식물 자원화 사업 관련부서 협의(5회)

- 농업기술센터, 환경녹지과

○ 2015. 11. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 심사

○ 2016. 03. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 계약

○ 2016. 04. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 중간보고

○ 2016. 05. : 지방재정투자 자체 심사

○ 2016. 12. : 실시설계 완료 (연구동, 테마공원)

○ 2017. 03. : 테마공원 조성 도 계약심사 완료

○ 2017. 06. : 경관 및 공공디자인진흥위원회 심의 완료(연구센터, 고둥전시관, 보전센터)

○ 2017. 09. : 테마공원 조성 사업 발주

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	80

□ 향후 추진계획

○ 2017. 09. : 공사추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 15,050백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	12,000	6,000		6,000		15,050	6,350		8,700
2014
2015
2016
2017	4,600	2,300		2,300		7,650	2,650		5,000
2018.6	7,400	3,700		3,700		7,400	3,700		3,700
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

3-1-2	신안 연예인 예술마을 조성

지역경제과 / 과장 박성호 / 투자개발담당 김세철 / 담당자 윤보라(240-8332)

2017년 새천년대교 완공을 통한 관광객 유치와 전라남도를 대표하는 신안

스타파크 및 연예인예술마을 조성하여 한류창작 랜드마크 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 사업위치 : 신안군 자은면 분계리 일원

○ 사 업 비 : 13,500백만원(국비750, 군비750, 민자 12,000)

○ 사업기간 : 2015 ~ 2017

○ 조성면적 : 부지 6,678㎡, 건축연면적 251.19㎡

○ 사업내용 : 예술인의 집, 갤러리, 야외조각공원 조성

□ 지금까지 추진상황

○ 2016. 11 : 군 관리계획(재정비) 결정(변경) 반영

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	30

□ 문제점 및 대책

○ 새천년대교 개통에 맞춰 중부권 추진 검토

□ 향후 추진계획

○ 2017. 12 : 신안출신 예술인 대상으로 한 사업 설명 및 홍보활동 추진

○ 2018. 06 : 사업계획 확정

○ 2018. 08 : 지방재정투자 심사 및 지특 사업 신규 신청

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	13,500	750		750	12,000
2014
2015
2016
2017
2018.6	13,500	750		750	12,000
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

3-1-3	신안 문화예술회관 및 문화원 건립

문화관광과 / 과장 박길호 / 문화예술담당 양승희 / 담당자 주성민 (240-8352)

군수님의 역점 시책인「신안 종합 복합타운」조성을 위한 문화관광과

소관「문화예술회관 및 문화원 건립」 사업 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 신안군 암태면 단고리 967번지 일원

○ 규    모 : 공연장(350석) 및 문화원

○ 사 업 비 : 7,100백만원 (국비 2,000, 지특 500, 군비 4,600)

▪ 문화예술회관 : 5,700백만원 (국비 2,000, 군비 3,700)

▪ 문   화   원 : 1,400백만원 (지특 800, 군비 600)

○ 사업내용 : 문화예술회관(대공연장, 분장실, 연습실), 문화원(사무실, 소공연장, 회의실, 전시실, 도서실 등)

□ 지금까지 추진상황

○ 부지 확정 : 2016. 4월

○ 기본계획 및 타당성 검토 용역 완료 : 2016. 9월

○ 문체부 최종선정 승인 : 2017. 4월

○ 지방재정 투자심사(도) 승인 : 2017. 5월

○ 설계용역 도 계약심사 완료 : 2017. 7월

○ 공공건축 사업 계획 사전검토 신청(건축도시공간연구소) : 2017년 10월

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
		50%

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후 추진계획

○ ‘17. 12. : 기본 및 실시설계용역 추진(제안공모)

○ ‘18. 05. : 실시설계 용역 추진(BF, 건축디자인 심의 등)

○ ‘18. 06. : 군계획시설 실시계획 인가 추진

○ ‘18. 10. : 문화예술회관 및 문화원 착공

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	7,100	2,800		4,300
2014
2015
2016
2017
2018.1	1,500	200		1,300
임기후	5,600	2,600		3,000

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

3-1-4	신안 해저유물체험관 건립

문화관광과 / 과장 박길호 / 문화예술담당 양승희 / 담당자 이재근 (240-8353)

신안 해저유물체험관을 건립하여 역사의 현장과 함께 유물 발굴지에서 유물을 만날 수 있는 기회로 활용하고 문화가 융성한 지역으로 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 신안군 증도면 방축리 산 318-6외 5필지

○ 사업기간 : 2017 ~ 2020 (3년)

○ 사업규모 : 건축연면적 5,000㎡, 지하 1층/지상 2층

○ 사업내용 : 전시실, 수장고, 사무실, 자료실, 화재·도난 방지시설, 온습도 조절장치

○ 총사업비 : 8,000백만원 (지특 4,800, 군비 3,200)

○ 사업주체 : 문화체육관광부 / 문화재청 / 국립해양문화재연구소

□ 지금까지 추진상황

○ 국립해양유물 전시관 건립 건의 : 2016. 4

○ 국립해양문화재연구소와 업무협약 체결 : 2016. 10

○ 국립중앙박물관, 국립광주박물관, 목포해양문화재연구소 건의

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
		40%

□ 문제점 및 대책

○ 해저유물 대부분이 소장된 국립중앙박물관의 유물 이전 등이 쉽지 않고 박물관건립을 위한 전문인력 확보, 건축 및 유지비용 등의 어려움을 고려하여 체험관 건립사업으로 추진

□ 향후 추진계획

○ 2017. 12월 : 기본계획 및 타당성 검토 용역 계약

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	8,000	4,800		3,200
2014
2015
2016
2017
2018.6
임기후	8,000	4,800		3,200

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

3-1-5	수산물 유통물류센터 건립사업

특산물유통사업소 / 소장 박운기 / 특산물판매시설담당 강병순 / 담당자 정항원(240-8263)

송도 수산물 유통 및 해양음식 관광타운 조성

□ 사업개요

○ 사업명 : 수산물 유통물류센터 건립사업

○ 사업비 : 3,000백만원(국비 50%, 군비 50%)

○ 위  치 : 지도읍 읍내리 570-21번지

○ 내  용 : 수산물 판매장 24, 음식점 3개소 및 화장실 등 편의시설

□ 지금까지 추진상황

○ 2013. 08. 28 : 공사착공

○ 2014. 12. 29 : 공사완료

○ 2015. 02. 25 : 건축물 사용승인

○ 2015. 05. 06 : 수산물 유통물류센터 운영주체 선정 및 운영방안 확정

○ 2015. 06.    : 시설물 위탁계약 및 개장

○ 2016. 11.    : 복구사업 추진중

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100

□ 문제점 및 대책

○ 2016. 02. 27 : 유통물류센터 화재 발생

○ 화재 복구사업 추진중(건축, 소방, 통신, 전기공사 계약완료)

□ 향후 추진계획

○ 2016. 12. : 유통물류센터 화재 복구완료에 따른 시설물 관리 철저

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 3,000백만원 (기투자 금액 2,521백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	3,000	1,500		1,500		3,000	1,500		1,500
2014	2,521	1260.5		1260.5		2,521	1260.5		1260.5
2015	479	239.5		239.5		479	239.5		239.5
2016
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	완료

3-1-6	해안 모실길 조성(신안 명품 천도천색길 조성)

환경녹지과 / 과장 김동우 / 환경관리담당 박용건 / 담당자 황유영(240-8442)

우리군 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연․생태․역사 및 문화를

알리고 광활한 갯벌과 바다를 보면서 직접 체험할 수 있는 명품 천도천색길 개발로  새로운 관광자원 확보

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신안 해안모실길 조성(신안 명품 천도천색길 조성)

○ 위    치 : 신안군 일원

○ 사 업 량 : 신안 명품 천도천색길 코스개발, 홍보 및 광고 1식,

홈페이지 구축 1식, 스마트폰 어플제작 및 배포 1식

○ 사업기간 : 2012 ~ 2021(10년간)

○ 사 업 비 : 6,200백만원(지특 3,100, 군비 3,100)

< ‘길’ 현 황 >

모실길 명	추진실과	위 치	사업내용	사업비 (억원)	추진년도
해안모실길	환경공원과 (환경관리)	신안군 일원	77개모실길 1,000km 조성 (임도, 탐방로, 방조제길)	62	‘12 ~ ‘21
갯벌도립공원 탐방로	환경공원과 (자연환경)	신안군 일원	13개 읍·면 갯벌탐방로 조성	98	‘14 ~ ‘21
둘레길	문화관광과	흑산, 안좌	L=21.4km	15	‘13 ~ ‘16
도초 발매리 모실길	도서개발과	도초	L=3.9km	22	‘12 ~ ‘16
농촌체험 걷는길	농업기술 센터	비금	L=8km	0.9	‘15 ~ ‘16

□ 지금까지 추진상황

○ '12. 12 : 비금 해안모실길 조성 (5개코스 74.6km)

○ '13. 08 : 임자 해안모실길 조성 (4개코스 64.4km)

○ '13. 12 : 장산 해안모실길 조성 (5개코스 46km)

○ '14. 12 : 자은 해안모실길 조성 (5개코스 77.5km)

○ ‘16. 10 : 팔금 채일봉 일출·일몰 전망대 지상2층 건립

○ ‘16. 12 : 암태 해안모실길조성(모실길 5개코스 52km)

○ ‘17. 02 : 신안 명품 천도천색길 개발용역 발주

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	85

□ 향후 추진계획

○ ‘17. 02 : 신안 명품 천도천색길 개발용역 착수보고

○ ‘17. 06 : 신안 명품 천도천색길 개발용역 중간·최종 보고

○ ‘17. 07 : 관련 인허가 완료

○ ‘17. 07. ~ 12. : 신안 명품 천도천색길 자은도 사업구간 조성 완료

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	6,200	3,100		3,100		4.140	2.070		2.070
2014	2,500	1,250		1,250		2,500	1,250		1,250
2015	400	200		200		400	200		200
2016	360	180		180		360	180		180
2017	400	200		200		400	200		200
2018.6	2,540	1,270		1,270		480	240		240
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

3-1-7	섬 생활사 유물전시관 조성

문화관광과 / 과장 박길호 / 문화예술담당 양승희 / 담당자 이재근 (240-8353)

중부권에 섬만이 가지고 있는 생활사유물을 전시하여 사라져 가는 유물을 보존 사진미술관을 통한 문화관광 인프라 구축으로 다양한 관광자원화 모색

□ 사업개요

○ 사업위치 : 신안군 자은면 두봉길 584(구 두봉초등학교)

○ 사 업 비 : 2,200백만원(공모업체 1,676, 군발주 524)

○ 사업기간 :

○ 조성면적 : 부지 18,205㎡, 건축연면적 957.58㎡(1층 6동, 2층 1동)

○ 내    용 : 섬 생활사유물전시관 및 사진전시관 조성

□ 지금까지 추진상황

○ ‘13.  5.  9 : 사진의 섬 및 생활사유물전시관 조성계획 수립

○ ‘13. 12. 18 : 협상에 의한 계약 체결 (엔쓰리디앤티 대표 옥승진)

▪ 총 괄 : 1,676백만원

▪ 1차분 :    63백만원 (설계용역 완료)

▪ 잔 여 : 1,613백만원 (리모델링 및 전시용역 미추진)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
			√

□ 문제점 및 대책

○ 사진 관련 콘텐츠 및 전시유물의 절대 부족으로 사업추진 부적합

○ 생활사 유물수집 및 연구기관과 공동 추진 필요

□ 향후 추진계획

○ 보류

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계
2014
2015
2016
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

3-1-8	홀리랜드 조성 사업

문화관광과 / 과장 박길호 / 관광개발담당 이명진 / 담당자 김형언(240-8357)

개신교의 최초 여성순교자이며, 섬 선교의 선구자 문준경 전도사 순교지

등을 중심으로 순교공원화 사업 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 신안군 증도면 대초리 일원

○ 총사업비 : 59,200백만원 (국비 2,800, 지특 17,800, 지방비 18,600, 민자 20,000)

○ 사업내용 : 순교지 및 관련 유적 정비, 관광자원화 사업 등

○ 사업기간 : 2017 ~ 2024 (7년)

○ 세부계획                                          (단위 : 억원)

구분	세 부 사업명	사업비	사업내용	재원 조달	재원 확보
1단계 (2017 ~ 2018)	증도 기독교 체험관 건립 사업	95 국비 28 지방비 67	- 기독교 체험관 - 부대시설	국비 30% 지방비 70%	문화체육관광부 종교문화시설 사업
	증도 한반도 해송숲 관광자원화 사업	97 지특 58 지방비 39	- 워터파크 조성 - 야외풀장 리모델링 - 생태탐방로 개설 - 주차장 조성 - 자전거 종합센터	지특 60% 지방비 40%	문화체육관광부 문화관광자원화 사업
2단계 (2018~ 2021)	관광인프라 구축 및 체험형 테마공원 조성	100 지특 70 지방비 30	- 디지털아트 센터 - 체육시설 및 공원 - 야외체험장, 조형물 - 야영장, 짚라인 등	지특 70% 지방비 30%	국토교통부 성장촉진지역개발 사업
3단계 (2019~ 2024)	증도 해양 관광· 휴양단지 조성	100 국.지특 50 지방비 50	- 상하수도 , 샤워장, 주차장 등	국.지 50% 지방비 50%	문화체육관광부 관광지 개발 / 국토교통부 남해안권발전종합계획 신규 개발지역지정 / 해양권 관광거점형 지역개발 시범사업
	숙박시설 확충	200 민자 200	- 청소년활동진흥법상 유스 호스텔 - 주민참여형 숙박시설 (생산관리지역→계획관리지역)	민자 100%

□ 지금까지 추진상황

○ 2016.  5 : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 완료

○ 2016.  5 : 지방재정투자심사

○ 2016. 11 : 2017 국고 및 지특 반영

○ 2016.  5. : 기본계획 수립 및 타당성조사용역 완료

○ 2016.  5. : 공유재산관리계획 취득 변경 승인

○ 2016.  9. : 산림청 교환부지 현장 답사(가거도)

○ 2016. 10. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청 (국가공공건축지원센터)

※ 건축서비스산업 진흥법(설계비 2.1억이상 사업계획 사전검토 후 설계공모 의무화)

- 기독교체험관건립 설계비 : 4.3억원

○ 2016. 10. : 공공건축 사업계획 사전검토 1차 보완 자료 요구

○ 2016. 11. : 공유재산관리계획 변경 (산림청 교환 3필지 추가)

○ 2016. 11. : 공공건축 사업계획 사전검토 회신

○ 2017. 06. : 홀리랜드조성사업 종합배치계획 수립 용역

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	50%

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후 추진계획

❍ 설계 공모 : 2017. 12.

❍ 기본조사 및 실시설계 : 2017. 12. ~ 2018. 03.

❍ 홀리랜드 2단계 도서개발사업 반영 추진 : 2018 ~ 2019

▪ 사 업 명 : 증도 테마공원 조성 사업

▪ 위    치 : 전남 신안군 증도면 대초리 산220-2임 (산림청 소유)

▪ 사 업 비 : 100억원 (지특 70, 군비 30)

▪ 사업내용 : 야영장, 레저 스포츠 시설(짚라인, 스포츠 클라이밍,  번지점프, 엠티비 파크), 체육시설, 숲 체험시설 등

❍ 군관리계획변경 (농림지역, 보존산지 해제) : 2018. 06.

❍ 건축 허가 : 2018. 03.

❍ 1단계 사업 착공 : 2018. 06. ~

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 59,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	59,200	20,600		18,600	20,000	3,833	1,400		2,433
2014
2015
2016
2017	3,700	1,400		2,433		3,833	1,400		2,433
2018.6	4,000	1,500		2,500
임기후	51,500	17,700		14,787	20,000

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부 (1단계 사업 정상 추진)

3-1-9	이순신 장군 역사기록 재현 사업

문화관광과 / 과장 박길호 / 문화예술담당 양승희 / 담당자 이재근  (240-8353)

임진왜란의 3대 대첩인 명량해전의 승리 이후 이순신장군이 거쳐간 신안

도서지역에 대한 스토리텔링 사업 추진을 통한 관광자원화 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 신안군 장산면, 팔금면, 암태면, 지도읍 일원

○ 사 업 비 : 170백만원(도비100, 군비70)

○ 사업기간 : 2015 ~ 2018

○ 사업내용 : 기념조형물 및 유적지 정비, 탐방로 조성 등

□ 지금까지 추진상황

○ 장산도 대성산성 지표·시굴조사 : 2015. ~ 2016.

○ 설화 발굴 용역완료 : 2017. 3월

○ 장산도 역사문화 관광자원화 사업계획 변경승인 : 2017. 7월

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	80

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후 추진계획

○ 2018년 상반기 : 대성산성 문화재 지정

○ 2018. : 이순신 수군 재건로 복원을 위한 학술조사(신안문화원) 추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 170백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	170		100	70		170		100	70
2014
2015	50		50			50		50
2016	100		50	50		100		50	50
2017
2018.6	20			20		20			20
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

3-1-10	유배문화 역사관 건립

문화관광과 / 과장 박길호 / 관광개발담당 이명진 / 담당자 고현욱(8979)

천혜의 관광자원과 연계한 국내 최초 유배문화 역사관 건립

□ 사업개요

○ 위    치 : 신안군 도초면 우이도리 일원

○ 사업기간 : 2018 ~ 2020년 (3년)

○ 사업규모 : 8,000백만원(국비4,000, 지방비4,000)

○ 재원방안 : 국비(50%), 지방비(50%)

○ 주요시설 : 전시관․체험장, 공원, 주차장 등 편의시설

□ 지금까지 추진상황

○ 2009. 04 : 신안 흑산 유배문화체험공원 기본계획 용역

○ 2015. 02 : 지역발전특별회계(2016년)사업 신청 : 흑산 사리

○ 2016. 02 : 지역발전특별회계(2017년)사업 신청 : 도초 우이도리

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
		30

□ 문제점 및 대책

○ 유배문화 역사관건립 위치변경으로 인하여 임기 내 사업완료 불가

□ 향후 추진계획

○ 2018. 02 : 지역발전특별회계 신규 사업 신청

○ 2018. 03 : 유배문화 역사관 건립 기본계획 용역

○ 2018. 07 : 지방재정 투․융자심사 등 행정절차 이행

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	8,000	4,000		4,000
2014
2015
2016
2017
2018.6	8,000	4,000		4,000
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

3-1-11	관광 인프라 구축을 통해 지역경제활성화

흑산공항중심권개발단 / 단장 양국진 / 개발지원 담당 권현오/ 담당자 이미정(240-8772)

흑산공항 개항을 통해 동북아 해양관광 관문 역할 수행으로 도서지역의 교통 불편을 해소하고 관광활성화를 통한 관광수요 증가로 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 해양․항공 관광 인프라단지 사업

○ 사업대상 : 흑산권

○ 사 업 량 : 흑산공항 건설 및 관광기반시설확충(민자호텔 등)

○ 사 업 비 : 7,042.9억원(국비 1,857.2억, 도비 1,208.4억, 군비 1,049.5억, 민간 2,927.8)

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2020년(11년간)

□ 지금까지 추진상황

○ ‘08. 11. : 흑산도 경비행장 및 숙박시설 투자관련 최초협상

○ ‘09. 02. : 흑산도 투자개발사업 특수목적법인(SPC) 설립

- 신안항공개발(주주:혜초여행사, 유마항공, 오즈아이비)

○ ‘09. 05. : 양해각서체결(전남도·신안군·투자자)

○ ‘10. 01. : 경비행장 및 부대시설 예정부지 토지 매입

- 매입완료 :  77필지 195,583㎡(59,163평)

○ ‘10. 12. : 숙박시설지구 기본계획 및 공원계획 변경 용역발주(신안군·투자자)

○ ‘11. 01. : 제4차 공항개발 중장기 종합계획 고시(국토교통부)

○ ‘11. 09. : 자연공원법시행령 개정(활주로 1,200미터 이하 소형공항 건설 가능)

○ ‘13. 03. : 흑산공항 건설 예비타당성 조사(기획재정부, B/C 4.38)

○ ‘15. 12. : 국립공원 해제구역 규제개혁 끝장 토론회(환경부)

○ ‘16. 02. : 국립공원 해제건의에 따른 환경부 협의

○ ‘16. 10. : 흑산공항 건설공사 설계․시공 일괄입찰 공고(서울지방항공청)

○ ‘17. 04. : 흑산공항 건설공사 기본설계 착수(금호+롯데+포스코 콘소시엄)

○ ‘17. 10. : 실시설계 착수(~‘18.1.26, 4개월)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	65%

□ 문제점 및 대책

○ 사업부지가 국립공원지역으로 인․허가 규제 제한지역

○ 국립공원 해제구역 규제개혁 협의 건의 → 공원변경법 장기소요

○ 국립공원 계획 변경 심의 후 사업시행 가능

□ 향후 추진계획

○ ‘18. 01. : 실시설계 완료

○ ‘18. 02. : 공항건설 착공

○ ‘20. 02. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 704,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	704,300	185,700	120,800	105,000	292,800	41,500	41,500
2014
2015						2,000	2,000
2016						1,950	1,950
2017						20,800	20,800
2018.6						16,780	16,780
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	흑산공항 착공 가능

3-2-1	항로가시권 경관조성

환경녹지과 / 과장 김동우 / 경관조성담당 강용도 / 담당자 고유경 (240-8926)

섬지역 특색에 맞는 조림사업 추진으로 산림의 공익적‧경제적 가치 증진 및     차별화된 관광자원 확충

□ 사업개요

○ 위    치 : 주요 항로가시권(안좌-팔금)

○ 조성면적 : 50ha

○ 사 업 비 : 840백만원(국비468, 도비111, 군비261)

○ 추진기간 : 2015 ~ 2018

□ 지금까지 추진상황

○ 2015. 01. ~ 05.   안좌-팔금 항로권 조림(12ha) / 240백만원

- 식재량 : 3,728본(먼나무1,229/가시나무1,008/구실잣밤672/해송819)

○ 2016. 01. ~ 12.   안좌-팔금 항로권 조림(25ha) / 500백만원

- 식재량 : 6,529본(편백523/가시나무1,981/때죽나무990/복자기990/

홍단풍990/복사나무990, 산딸나무115)

○ 2017. 01. ~ 05.   안좌-팔금 항로권 조림(19ha) / 242백만원

- 식재량 : 5,123본(산딸 820/복사 1,120/벚나무 300/후박 300, 관목류 2,583)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100				56ha 완료됨 추후, 지속추진

□ 문제점 및 대책

없음

□ 향후 추진계획

○ 2018년 : 안좌-팔금 항로가시권 경관조림 / 8ha / 160백만원

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	840	468	111	261		1,000	548	135	317
2014
2015	240	168	21	51		240	168	20	52
2016	400	200	60	140		500	250	75	175
2017	200	100	30	70		260	130	40	90
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

3-2-2	체류형 관광코스 개발

문화관광과 / 과장 박길호 / 관광정책담당 박상규 / 담당자 김지수(8359)

호남고속철 개통과 2018년 새천년대교 개통 등 교통여건 개선에 따라 관광객 증가가 예상됨에 따라 다양한 관광 콘텐츠 개발을   통한 체류형 관광 유도로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 체류형 관광상품 개발

○ 신규 관광지 개발로 체류형 관광기반 여건 구축

○ 지속적인 홍보 및 마케팅 추진

□ 지금까지 추진상황

○ 신안군 관광협의회 준비위 결성 및 설립 추진 중

- 기간 : 2017. 4. ~ 12.

- 대상 : 14개 읍․면 관광관련 사업자, 지역 시민단체 등

- 내용 : 주민주도 지역관광 홍보 및 관광사업 기획․실행

○ 관광활성화 팸투어 추진

- 기간 : 2017. 1. ~ 11.

- 대상 : 한국관광클럽, 수도권여행사, KTX여행센터 외 11건

- 내용 : 관광활성화 관련 신안 여행상품 개발 팸투어

○ ‘남도한바퀴’ 투어버스 운영

- 기간 : 2017. 4. ~ 12. (매주 토․일요일 2회)

- 장소 : 중부권(자은․암태․팔금․안좌), 증도 / 2개 코스운영

- 지원 : 중부권 관광버스 운행 지원

○ ‘천도천색 천리길’ 자전거 여행상품 운영

- 기간 : 2017. 3. ~ 11 / 코스 : 12개 읍․면 8개 코스 (총 500Km)

- 내용 : ‘사이클링 신안 2017’ 대회 개최 및 자체 투어상품 진행,     자전거 단체(동호회) 대상 인센티브 지원

○ 세일요트 ‘신안천도천색호’ 상품 운영

- 준비기간 : 2017. 3. ~ 6.

- 내    용 : 마리나선박 대여업 등록, 시범 운행

- 상품운영 : 2017. 7. ~ 12.

- 내    용 : 섬투어, 요트 숙박(스테이)상품 및 관광상품 연계 운영

○ 권역별 관광상품 개발 및 운영

- 기간 : 2016. 5. ~ 10.

- 장소 : 중부권, 비금․도초, 하의․신의

- 내용 : 여행 사업자 업무협약, 내년도 상품 운영위한 시범운영

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100%	0	0	0

□ 향후 추진계획

○ 권역별, 테마별 여행상품 공모 : 2018. 1. ~

- 신안군 여행상품 주력 여행사․기관 협약 : 2018. 2. ~

- 팸투어 및 프로모션 : 2018. 2. ~

○ 신안군 관광협의회 운영 : 2018. 1. ~

- 관광협의회 발대식 및 법인등록 : 2018. 1. ~

- 관광협의회 운영 : 2018. 2. ~

○ 자전거 투어 상품 지속 운영 : 2018. 3. ~

- 코스 : 8개 코스 및 인증지점․코스 추가 개발

- 행사 : 상‧하반기 ‘사이클링 신안 2018’ 개최, 매월 자체 여행상품 운영

○ 세일요트 ‘신안천도천색호’ 운영 : 2018. 3. ~

- 지역과 연계한 추가 관광상품 개발 : 2018. 3 ~

- 2004호 마리나업 등록 및 상품운영 : 2018. 3 ~

○ 남도한바퀴 투어상품 지속 지원 : 2018. 4. ~

- 중부권 및 증도 코스 : 2018. 4. ~

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 2,540백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	2,540	80		1,460		2,072	80		1,992
2014	50			50		50			50
2015	100			100		100			100
2016	1,390	80		1,310		1,390	80		1,310
2017	500			500		532			532
2018.6	500
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

3-2-3	신안 중남부권 관광 연륙교 계획

안전건설방재과 / 과장 박종원 / 도로시설담당 천중영 / 담당자 정원중(240-8471)

낙도지역인 안좌 한운~사치~수치~도초 도락 권역에 해양실크로드를 조성하여  휴양․레저․어촌체험 등이 가능한 체류형 명품 해양도로 조성

□ 사업개요

○ 노 선 명 : 군도8호선

○ 위    치 : 안좌면 한운리 ~ 도초면 만년리

○ 사 업 량 : L=10.37km(교량 L=3.03km, 도로 L=7.34km)

○ 사 업 비 : 2,275억원

□ 지금까지 추진상황

○ 2015. 03 : 기본조사용역 완료

○ 2015. 05 : 군도8호선 기점부 변경 승인(전라남도)

- 당초 : 안좌 한운~안좌 여흘(16.2km), 변경 : 도초 만년~안좌 여흘(28.1km)

○ 2015. 09 : 기본계획수립용역(안좌 한운~상사치) 시행

○ 2016. 02 : 기본계획수립 중간보고회 개최

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
-	-	30%	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 국도2호선(비금~추포) 건설사업이 2014년 4월 KDI에서 타당성재조사  결과(B/C=0.4, AHP=0.416) 기준에 미달하여 사업추진이 불가능한 실정임

○ 경제적인 도로건설로 낙후지역 지역경제 활성화 및 도서주민, 관광객의  뱃길이용 불편 해소를 위해 총사업비 규모가 적은 노선(안좌~도초)으로  변경을 통해 조기 건설이 요구됨

□ 향후 추진계획

○ 2016. 06 : 중간보고회 및 기본계획수립용역 완료

○ 2016. 11 : 국도2호선(암태~비금구간) 최적경유지선정 용역 시행

- 사업비 : 150,000천원

○ 2017. 12 : 국도2호선(암태~비금구간) 최적경유지선정 용역 완료

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 227,850백만원 (기투자 금액 0백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	227,850	226,500	200	1,150	-	1,350	-	200	1,150	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	200	-	200	-	-	200	-	200	-	-
2016	1,150	-	-	1,150	-	1,150	-	-	1,150	-
2017	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2018.6	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	219,500	219,500	-	-	-	-	-	-	-	-

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부

3-3-1	지속가능한 대표축제 개발

문화관광과 / 과장 박길호 / 관광정책담당 박상규 / 담당자 오수영(8684)

❍ 새천년대교 개통을 대비하여 증도~자은간 여객선 이용률 제고, 중부권 해수욕장, 세일요트, 천도천색길, 홀리랜드 등 신규 관광지 홍보

❍ 광활한 바다를 보유하고 있는 신안군에서 익스트림 스포츠의 대명사인 트라이애슬론(철인3종 경기) 대회를 개최하여 해양 레저스포츠 활성화에 기여

❍ 더불어 국제 해양도시로서의 면모와 전국적으로 유명한 지역 특산품 소비 및 홍보

□ 사업개요

○ 축제 구분

▪ 춘계 : 신안 튤립축제 (임자)

▪ 하계 : 신안 트라이애슬론(철인3종 경기) 대회 (증도)

▪ 추계 : 신안군 대표 축제 (안좌도)

○ 사 업 비 : 250백만원 (군비)

□ 지금까지 추진상황

○ 대표축제 개발 용역(기획홍보실) : 2017. 1. ~ 2017. 7.

○ 2017 신안 트라이애슬론대회 : 2017. 5. 20. ~ 5. 21.

○ 2017 섬들의 고향 신안화합대축제 : 2017. 9. 15. ~ 9. 16.

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100%

□ 향후 추진계획

○ 2018 대표축제 세부 시행계획 수립 : ‘17. 7. ~ 12.

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	250			250		150			150
2014
2015
2016	50			50		50			50
2017	100			100		100			100
2018.6	100			100
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

3-3-2	수산물 별미축제 정비

해양수산과 / 과장 문성칠 / 수산산업담당 김용주 / 담당자 김용주(240-8908)

중요 축제는 발전시키되 무질서하게 열리고 있는 선심성․낭비성 축제는 정비

□ 사업개요

○ 사업명 : 신안군 수산물 축제

○ 사업비 : 20백만원

○ 위  치 : 지도읍(젓갈타운)

○ 내  용 : 김장철 신안젓갈 판촉 행사

□ 지금까지 추진상황

○ 2015. 05. 08 : 신안 흑산홍어축제 개최 완료

○ 2015. 05. 18 : 신안 병어랑 농수산물 장터축제 보조금 결정

○ 2015. 06. 04 : 중동호흡기증후군(메르스) 확산 방지를 위한 축제 취소

○ 2016. 10.    : 신안젓갈 판촉 행사 추진

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100

□ 문제점 및 대책

○ 신안 병어, 짱뚱어, 불볼락 축제 지속적인 건의서 접수 중

○ 신안 대표 축제 발굴하여 추진 예정

□ 향후 추진계획

○ 축제 추진계획 수립시 군민의 날 행사와 병행 추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 20백만원 (기투자 금액 0원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	20			20		20			20
2014
2015	20			20		20			20
2016
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	완료

4-1-1	종합복지센터 건립

주민복지과 / 과장 김영주 / 노인복지담당 김창업 / 담당자 최성원(240-8943)

민선3기 안좌에 시범적으로 기획하였던 종합복지센터를 전 읍면으로 확대하고 목욕탕․찜질방․회의실 등 주민편의 공간을 제공

□ 사업개요

○ 복지회관 준공 : 10개소, 22,684백만원

∙ 지도, 임자, 자은, 비금, 도초, 흑산, 하의, 장산, 안좌, 팔금

- 규  모 : 1동 2~3층

- 구  성 : 경로식당, 건강관리실, 공중목욕장, 프로그램실 등

○ 복지회관 건립 추진(추가) : 2개소,

∙ 압해읍 복지회관 : 공사(공정 100%)

∙ 신의면 복지회관 : 공사(공정 100%)

□ 지금까지 추진상황

【압해읍 복지회관 (공정 100%)】

○ 공사 착공 : 2014. 12.

○ 공사 준공 : 2015. 12.

【신의면 복지회관 (공정 100%)】

○ 공사 착공 : 2015. 03.

○ 공사 준공 : 2016. 05.

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
○

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 없음

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 4,750백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	5,040	1,620	840	2,580		4,723	1,100		3,623
2014	3,300	1,620	840	840		1,068	600		468
2015	1,740			1,740		3,655	500		3,155
2016
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	완료

4-1-2	신안군 종합복합타운 설립

문화관광과 / 과장 박길호 / 관광개발담당 이명진 / 담당자 김태형(8978)

새천년대교 개통 등 사회발전지표와 주변지역 변화에 대응하고 인구유입의 정주여건을 조성하기위한 문화․체육․복지 인프라를 구축하여 군민들의 삶의 질 향상과 미래 성장동력 육성 및 지역경제의 활설화를 도모 하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 암태면 단고리 967 일원(조성 면적 약 33,900㎡)

○ 사업기간 : 2016 ~ 2019(4개년)

○ 사 업 비 : 18,654백만원(국5,057, 기금3,300, 도474, 군9,823)

○ 사업내용 : 보건지소(1,110㎡), 국민체육센터(2,908㎡), 보훈회관(640㎡)

문화예술회관(1,727㎡), 문화원(545㎡)

○ 사업규모 : 조성면적 33,900㎡, 건축연면적 6,930㎡(약2,100평)

□ 지금까지 추진상황

○ 2016.  03. 25. : 신안군 종합복합타운 기본계획 및 적격성 검토 용역

○ 2016.  04. 05. : 용역계약 완료(목포대학교 산학협력단 대표 송하철)

○ 2016.  08. 17. : 신안군 국민체육센터 사업추진

○ 2017.  06.     : 기능확대형 보건지소 착공

○ 2017.  06. 24. : 신안군 국민체육센터 1차 준공

○ 2017.  06. 24. : 신안군 국민체육센터 2차 착공(전체공정율 75%)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	70

□ 향후 추진계획

○ 2017.  12. : 신안군 종합복합타운 조성사업 기본 및 실시설계(PQ)용역설계 추진

○ 2018.  01. : 신안 국민체육센터 건립공사 준공

○ 2018.  03. : 기능확대형 보건지소 준공

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 18,654백만원 (기투자 2,000백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	18,654	8,357	474	9,823		10,354	5,197	474	4,683
2014	7,509	3,300		4,209		7,509	3,300		4,209
2015	2,845	1,897	474	474		2,845	1,897	474	474
2016
2017	1,000	500		500
2018.6	2,000	1,000		1,000
임기후	5,320	1,660		3640

임기내 (2018. 06까지) 완료 가능 여부	부

4-1-3	종합 체육시설 복합복지공간 활용

문화관광과 / 과장 박길호 / 체육지원담당 박천용 / 담당자 장기준(240-8367)

다목적생활관, 종합체육시설을 건립하여 축제․행사․체육대회․회의

․교육 등 복합 복지공간으로 활용

□ 사업개요

▷ 신안공설운동장

○ 위    치 : 신안군 압해면 신용리 47-2번지 일원

○ 사업기간 : 2008 ~ 2016

○ 면    적 : 85,252㎡(건축1,283.9㎡, 연면적 2,927.16㎡)

○ 사 업 비 : 17,700백만원(광특 4,450 / 군비 13,250)

○ 주요시설 : 관람석 5,000석(본부석880, 토공4,120), 인조구장, 트랙,

주차장(304대), 씨름장, 야외화장실, 산책로 등

▷ 신안 국민체육센터

○ 위    치 : 신안군 암태면 단고리 967 일원

○ 사업기간 : 2010 ~ 2018

○ 사 업 비 : 4,300백만원(기금 3,300 / 군비 1,000)

* 부속시설(목욕장, 식당, 휴게실) : 2,800백만원

○ 연 면 적 : 2,818.13㎡

○ 주요시설 : 실내체육관(코트, 무대, 체력인증센터, 사회단체사무실 등)

□ 지금까지 추진상황

○ 신안 공설운동장 : 준공(2016.10.15.)

○ 신안 국민체육센터

- 2013. 11 : 실시설계 완료

- 2014. 05 : 시설공사(건축,전기,소방,통신) 계약

- 2015. 07 : 군 계획시설(체육시설) 실시계획인가 고시 완료

- 2015. 08 : 시설공사 착공(부지정비/성토 : 8,064㎥)

- 2017. 06 : 신안 국민체육센터 건립공사 1차분 완료(2,321백만원)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	97

□ 종합 체육시설 활용 방안

○ 주민 복지형 체육시설 운영

- 공중목욕장, 식당, 휴게소, 도서관 등 주민 편의시설을 갖춘 종합체육        시설로서 주민 모두가 이용할 수 있는 복지센터로서의 역할

- 체육시설을 주민 모두가 자유롭게 이용할 수 있는 정보 교환 및           친목의 장소로 활용

○ 청소년 및 군민 건강증진 프로그램 개발

- 유소년 축구교실, 배드민턴, 풋살 등 각종 스포츠 클럽 대회를 통해        학생들을 능동적이고 건강하게 성장할 수 있도록 유도

- 청소년, 성인 등 모든 계층을 대상으로 한 생활체육 프로그램 개발        및 체력 인증센터 운영으로 군민 건강 증진 도모

- 군민들의 건강 증진 기회 제공으로 생활체육 활성화

□ 향후 추진계획

○ 신안 국민체육센터 : 2017년 12월 준공 예정

- 2차분 공사 계약완료 및 추진

- 공사금액 :5,179백만원

- 신안군 종합복합타운 조성사업 연계 추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

합 계	총 사업비(백만원)	기투자 금액(백만원)
공설운동장 조성	17,700	7,825
국민체육센터건립	7,100	3,772

구분	예산확보 계획(단위:백만원)					예산확보 실적(단위:백만원)
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	9,875	1,100		8,775		7,803	1,100		6,703
	3,328			3,328		2,118			2,118
2014	4,570			4,570		5,370			5,370
	1,518			1,518		1,518			1,518
2015	1,833	1,100		733		2,433	1,100		1,333
	600			600		600			600 (특교세)
2016	3,472			3,472
2017
	1,210			1,210
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

4-2-1	귀농·귀촌 안정적인 정착지원

농업기술센터 / 소장 강을원 / 농촌지원과장 조진언 / 인력육성담당 최선희 / 담당자 이정훈(240-4122)

농촌인구 감소에 따른 귀농·귀촌 인구유입 및 성공적인 영농정착을 위한 맞춤형

서비스 정착지원으로 농촌인구 유입 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 영농조건 등 우수성 홍보 및 현지상담을 통한 맞춤형 서비스 제공

○ 귀농인, 은퇴자 등 안정적인 영농정착을 위한 기반구축

○ 2030세대를 젊은 농업인으로 육성하기 위한 다양한 유인책 마련

□ 지금까지 추진상황

▷ 임기내 추진할 사업량 대비 종합진도율 : 95%

ㅇ 2014년도 실적 : 예산액 392백만원

- 귀농인 농가주택수리비 지원 : 36개소, 180백만원

- 귀농인 현장실습교육 : 5개소, 30백만원

- 귀농인 정착장려금 및 유치장려금 지원 : 117백만원

- 귀농인 현지융화 지원 : 45백만원

- 영농정착 교육추진 : 4과정 634명, 20백만원

ㅇ 2015년도 실적 : 311.7백만원

- 귀농인 농가주택수리비 지원 : 17개소, 93.5백만원

- 귀농인 현장실습교육 : 8개소, 48백만원

- 귀농인 정착장려금 및 유치장려금 지원 : 65백만원

- 귀농인 현지융화 지원 : 25백만원

- 귀농인의 집 조성사업 : 3개소, 67.5백만원

- 영농정착 교육추진 : 3개 과정 22회, 12백만원

- 홍보 리후렛 제작 : 1,000부, 770천원

ㅇ 2016년도 실적 : 198백만원

- 귀농인 농가주택수리비 지원 : 15가구, 82.5백만원 (5.5백만원/개소)

- 귀농인 정착장려금 및 유치장려금 지원 : 22개소, 40백만원

- 귀농인 현지융화 지원 : 12개소, 6백만원

- 귀농인 현장실습(국비) : 8개소, 48백만원

- 귀농 영농정착 교육 : 2개과정, 94시간, 75명, 20백만원

- 홍보 리후렛 제작 : 1,000부 제작, 1.5백만원

ㅇ 2017년도 실적 : 387.5백만원

- 귀농인 정착장려금 지원 : 16개소, 3~6백만원/가구, 44.5백만원

- 도시민 유치장려금 지원 : 10가구, 100만원/가구, 10백만원

- 귀농인 현지융화 지원 : 16가구, 50만원/가구, 8백만원

- 귀농 현장실습 지원 : 5개소, 6백만원/개소, 30백만원

- 귀농인 농가주택수리비 지원 : 17개소, 5.5백만원/개소, 93.5백만원 (보조90, 자담10%)

- 귀농 정착지원사업 : 6개소, 10백만원/개소, 60백만원 (보조50, 자담50%)

- 귀농인의 집 조성사업 : 4개소, 30백만원/개소, 120백만원

- 귀농 영농정착 교육 : 2개과정, 60명, 20백만원

- 귀농 지원사업 홍보 리플릿 제작 : 2회, 2000부, 1.5백만원

□ 문제점 및 대책

○ 귀농인 현지주민과의 갈등 : 갈등해소를 위한 지원사업 및 프로그램 운영

○ 안정적인 정착을 위한 정보 및 영농기술 부족 : 귀농정착교육 프로그램 운영

○ 안정정인 영농정착을 위한 지원사업 부족 : 정착지원 사업 확대 지원

□ 향후 추진계획

○ 귀농인 정착지원 사업 및 귀농인 현장실습교육 확대로 안전적인 영농정착 유도

○ 맞춤형 서비스 제공 및 영농정착 기술교육 추진으로 귀농인구 유입 확대

○ 관내 귀농 성공사례 발굴하여 홍보

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 2,150백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	자담	합계	국비	도비	군비	자담
합계	2,150	261	130	1,759	-	1,519.7	227	-	1,192.7	100
2014	392	12	34	346	-	392.0	25	-	367	-
2015	318	69	-	249	-	311.7	58	-	245.2	8.5
2016	360	45	24	291	-	198.0	34	-	156.5	7.5
2017	360	45	24	291	-	387.5	85	-	264	38.5
2018.6	360	45	24	291	-	230.5	25	-	160	45.5
임기후	360	45	24	291	-	-	-	-	-	-

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	가능

4-2-2	장애인복지대책 강화

주민복지과 / 과장 김영주 / 장애인복지담당 임윤미 / 담당자 양훈희(240-8423)

장애인의 인권침해 종합대책수립과 향후 예방조치 권리구제방안을 강화하는 등

장애인의 권리옹호 및 자립지원을 통한 실질적 체감도제고 및 인권사각지대 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년(5년간)

○ 총사업비 : 1,050백만원

○ 사업내용

- 장애인임시쉼터 한시적 운영

- 장애인담당 신설

- 장애인생활시설 민간위탁

- 중증장애인자립생활지원센터 운영

□ 지금까지 추진상황

○ 장애인임시쉼터 운영 : 2014.

○ 장애인인권담당 신설 : 2015. 02

○ 장애인생활시설 민간위탁 운영 : 2015. 05

○ 신안군장애인인권차별금지 및 인권보장에 관한 조례안 개정

○ 중증장애인자립생활지원센터 설치 지원에 관한 조례 제정

○ 중증장애인자립생활지원센터 설치 및 민간위탁 공모 추진

○ 중증장애인자립생활지원센터 위탁자 선정 및 운영 개시 : 2016. 10

○ 공무원, 주민, 사회복지시설기관 등에 대한 인권교육 및 홍보 추진

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
○

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 2,656백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	2,656			2,656		2,176.7		2.7	2,174
2014
2015	826			826		834			834
2016	510			510		1,342.7		2.7	1,340
2017	440			440
2018.6	440			440
임기후	440			440

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	완료

4-3-1	명문학교 육성

행정지원실 / 행정지원실장 장봉기/ 민관협력담당 손태원/ 담당자 서경진(240-8249)

관내 초등·중등·고등학교와 협의, 창의적·정서적 교육이 실현되도록 적극 지원

□ 사업개요

○ 초중고등학교 단계별 필요 학습 및 관내 전통적이며 특색있는 사업 추진

○ 학교, 교사, 학생의 관계가 유기적, 친밀하게 돌아갈 수 있는 교육환경 마련

□ 지금까지 추진상황

○ 창조적 역량과 글로벌 마인드를 가진 인재 양성 (2014~2017년)

- 수산계고교 특성화 프로그램 60백만원, 초중 원어민 영어화상 학습 50백만원

- 초,중 뉴질랜드 등 어학연수 327백만원, 초중 방과후 학습 900백만원

- 원어민 영어 보조교사 928백만원

- “신안군장학재단” 장학사업 다양화 및 내실 운영 : 789백만원

○ 교육여건 개선 사업 (2014~2017년)

- 초,중 무상급식 지원 1,495백만원

- 학교급식 친환경농산물 식재료지원 1,190백만원

- 중,고 야간자율학습 석식비 지원 2,000백만원

- 고등학교 기숙사 신축비 지원 200백만원

- 기타 다목적강당 사용료 지원등 10건 783백만원

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
○

□ 문제점 및 대책

○ 지방자치단체의교육경비보조에관한규정 제3조(보조사업의 제한)에 의거 교육경비(군비) 지원이 어려움에 따라 사업축소

(2015년 폐지사업 : 기숙형공립고 지원 등 8개사업, 년 1,453백만원)

□ 향후 추진계획

○ 현재 초·중·고등학생 단계별 필요 학습을 위한 지원사업에 대해 지속적인 지원으로 학력 수준 향상 및 창의적 교육 실현

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 12,865백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	재단	합계	국비	도비	군비	재단
합계	12,865	169	1,333	10,282	1,081	8,732	101	847	6,996	789
2014	2,753	33	253	2,204	263	2,752	33	253	2,204	263
2015	2,384	19	234	1,928	203	2,384	19	234	1,928	203
2016	2,113	19	243	1,674	177	2,113	19	243	1,674	177
2017	1,483	30	117	1,190	146	1,483	30	117	1,190	146
2018.6	2,066	34	243	1,643	146
임기후	2,066	34	243	1,643	146

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

4-3-2	다문화 가정 사회 참여 프로그램 운영

주민복지과 / 과장 김영주 / 여성가족담당 김미숙 / 담당자 이현주(240-8431)

다문화가정 결혼이민자 여성들의 사회참여를 제고하여 일자리를 창출하고 자아 성취 및 자존감을 높여줘 한국사회 조기적응 및 경제적 자립지원 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014 ~ 2018(5년)

○ 사업대상 : 83명(다문화가정 결혼이민자 여성 및 영유아 83명)

○ 사업내용

- 이중언어환경조성사업

- 다문화가정 모국어 상담 운영

□ 지금까지 추진상황

○ 이중언어지원사업 “언어 두 개, 기쁨 두배”

- 2014년 공모사업 신청 및 확정

- 2015년 사업대상 44명에게 부모교육 1회, 자조모임 1회, 교육 등 실시

- 2016년 두 개언어로 찾아가는 어린이집 부모-자녀 상호작용 교육 실시

5개면(임자, 비금, 흑산, 장산, 암태), 10회 50명 참여

- 신안군다문화가족지원센터에서 매년 대상자 확대 추진

○ 다문화가정 모국어 상담 운영

- 2014년 자원봉사자 2명 모집 및 모국어 상담 운영

- 다문화가정 모국어 상담 운영 실적 저조

(개인 사생활 등 민감정보 노출 우려에 따른 지역사회 상담원 기피)

- 다누리콜센터, 목포시, 영암군 다문화가족지원센터로 연계한 모국어 상담 추진

- 신안군 다문화가족지원센터 사업 홍보 및 연계 조치

- 다문화가정 방문교육지도사를 통한 모니터링 결과 기본상담 후      타 기관 상담소로 연계 조치

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
○

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 해당없음

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 75.2백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	75.2			69.2	6	17.9			11.9	6
2014
2015	17			11	6	12			6	6
2016	48			48		2.5			2.5
2017	3.4			3.4		3.4			3.4
2018.6	3.4			3.4
임기후	3.4			3.4

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

4-3-3	평생교육 활성화

행정지원실 / 행정지원실장 장봉기/ 민관협력담당 손태원/ 담당자 최연자(240-8248)

100세 시대, 군민에게 평생교육 기회 제공 및 자기계발을 통한 풍요로운 삶을 영위 할 수 있도록 지원

□ 사업개요

○ 위    치 : 압해읍, 자은면, 안좌면, 팔금면 암태면

○ 기    간 : 2017. 7월 ~ 12월

○ 프로그램 : 기초문해, 학력보완, 직업능력, 문화예술

- 문해교실, 피부관리, 이미용, 펠트공예, 홈패션, 색소폰, DIY 가구공예 등

○ 내    용 : 5개 읍면을 대상, 프로그램별 15개 행복학습동아리 운영

○ 사 업 비 : 63,000천원 (국비 50%, 군비 50%)

□ 지금까지 추진상황

○ 신안군 평생교육진흥 조례 제정 (2015. 10. 5.)

○ 2016년 행복학습센터 운영 : 5개 읍면, 12개 강좌

○ ‘16년 5월 : 교육부「평생교육 활성화 지원 공모사업」신청

○ ‘16년 6월 : 5개 읍면 선정 및 평생교육 대상자 모집

○ ‘16년 7월 ~11월 : 12개 동아리 운영

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
○

□ 향후 추진계획

○ ‘17년 7월 ~11월 : 15개 동아리 운영

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 358백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	358	179		151		186	93		93	-
2014	-	-		-		0	-		-
2015	62	31		31		62	31		31
2016	62	31		3		62	31		31
2017	62	31		31		62	31		31
2018.6	62	31		31
임기후	110	55		55

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

5-1-1	책임지는 신뢰행정 구현으로 융합시대 창조

세무회계과  / 과장 송광민  / 경리담당 정승일  / 담당자 박홍천(240-8321)

군정의 모든 사업은 전담제로 운영하여 시공에서부터 완공까지 책임지는 신뢰행정을 구현

□ 사업개요

○ 사업 현장별, 시공부터 준공까지 공무원과 지역주민이 관리하는 시스템을 도입 시범운영 후 확대방안 검토

○ 사업 전 과정에 지역여건과 현장상황에 밝은 지역주민 대표를 참여시켜 부실시공, 부조리 감시 역할 부여 및 행정에 대한 신뢰성 확보

□ 지금까지 추진상황

○ 주민참여 감독제 운영 협조 요청(2015.03.26) 공문 시행

○ 주민참여 감독제 운영 협조 요청(2016.05.17) 공문 재시행

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
100

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후 추진계획

○ 주민참여 감독제 운영에 대한 분기별 실적관리

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 :     백만원 (기투자 금액      백만원)

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계				해	당	없	음
2014
2015
2016
2017
2018.6
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	가능

5-1-2	군민 주권 우선 융합시대 창조

행정지원실 / 실장 장봉기 / 행정담당 송윤이 / 담당자 박상현(240-8234)

군민의 명예를 소중히 하고 군민 주권을 최우선시하는 한결 같은 마음으로 열린 군정을 펼쳐 모두가 통합되는 융합시대 창조

□ 사업개요

○ 제6회 전국동시 지방선거로 인한 지역간의 분열 및 갈등을 조기 해소하고 안정된 지역사회 분위기 조성을 위한 현장중심의 군정업무 추진

○ 군민과의 진솔한 대화를 통한 군정 발전방안 모색

○ 현장확인행정을 통한 군민에 대한 신뢰감 구축

○ 작은섬 주민들의 민생현장 방문 확대

□ 지금까지 추진상황

○ 읍면 희망토론회 실시

∙ 기    간 : 2015. 1. 20 ~ 3. 12.

∙ 장    소 : 읍면 회의실

∙ 주요내용 : 건의사항 수렴, 민생현장 방문 등

∙ 건의건수 : 512건 / 완결 189건, 추진중 243건, 불가 80건

(지도 32, 압해 42, 증도 31, 임자 50, 자은 38, 비금 32, 도초 50,

흑산 57, 하의 38, 신의 41, 장산 33, 안좌 27, 팔금 16, 암태 25)

○ 작은섬 사랑방 토론회

∙장산면 마진도 : 2016. 1. 27.(수) /∙하의면 신도 : 2016. 2. 2.(화)

∙비금면 수치도 : 2016. 2. 11.(목) /∙안좌면 박지도 : 2016. 3.30.(수)

∙임자면 재원도 : 2016. 6.  9.(목) /

∙흑산면 다물도, 대둔도 : 2016. 6. 20.(월)

∙증도면 병풍도, 기점도, 소악도 : 2016. 9. 19.(월)

∙암태면 당사도 : 2016. 9. 21.(수)

∙장산면 율도   : 2016. 10. 26.(수)

∙압해읍 고이도 : 2016. 11. 23.(수)

∙안좌면 자라도 : 2016. 11. 24.(목)

○ 읍ㆍ면장 회의 개최

∙3월중 읍면장회의 : 2016. 3. 4.(금) / 암태면사무소 회의실

- 현장중심으로 이동 개최 및 환경정화활동실시

∙12월중 읍면장회의 : 2016. 12. 23.(금) / 군청 영상회의실(3층)

○ 희망토론회 개최 : 14읍면(2017. 3월 ~ 6월)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
○

□ 향후 추진계획

○ 희망토론회 및 작은섬 사랑방 토론회 개최

∙ 기  간 : 2017년∼2018년

∙ 대  상 : 14개 읍면 및 53개 작은섬

∙ 내  용 : 군민의 애로, 고충사항 청취 및 군정방향 설명

○ 읍ㆍ면장회의 : 정례화 개최 (2개월 또는 분기별)

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여

5-2	투명하고 공정한 인사운영

행정지원실 / 실장 장봉기 / 행정담당 송윤이 / 담당자 조영재(240-8235)

투명하고 공정한 인사운영으로 직원 사기진작과 신바람 나는 직장분위기 조성

□ 사업개요

○ 인사운영 기본계획수립 시행으로 예측 가능한 인사운영

○ 정기 및 수시인사 시 사전예고제 시행 운영

□ 지금까지 추진상황

○ 2015, 2016년 인사운영기본계획 수립 및 공표

- 인사운영 방침 및 기본방향 제시

○ 공로연수 및 명예퇴직 계획 수립 및 공표

○ 각 부서 및 노조의 다양한 의견 수렴을 통한 전보인사 실시

○ 2016년 2월 ‘직원 사기 진작 대책 인사분야’ 발표

- 7급 이하 근속승진은 매 분기 1회 이상 수시 실시

- 인사제도개선위원회 운영

- 인사랑 내 인사민원방 내실 운영

- 전문성 확보를 위한 전문직위제 운영 및 홍보

- 근무실적 우수자 근무성적평정 실적가점 부여기준 마련

○ 2016년 10월 행자부 주관 인사컨설팅 실시

○ 조직진단 용역을 통한 효율적인 조직정비 실시(2016년 12월)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
○

□ 향후 추진계획

○ 인사운영기본계획에 따른 예측가능한 인사 실시

○ 사기진작 대책 등 기 수립된 정책에 대한 지속적인 추진

○ 기타 각종 의견 수렴을 통한 새로운 인사제도개선안 마련

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여