1-4	송공연안항 개발을 재추진

해양수산과 / 해야수산과장 문성칠 / 해양시설담당 조영일 / 담당자 박신영(240-8417)

2018년 새천년대교 개통과 연계하여 기존 목포항으로 통하던 모든 물적· 인적

연안교통체계를 송공항으로 집중시켜 물류비용절감의 극대화와 체계적인 어업

활동을 통해 낙후된 지역경제 활성화 도모를 위해 기반시설을 확충하는데 있음

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 압해 송공지구 공유수면 매립공사(2공구)

○ 위    치 : 신안군 압해읍 송공리(공유수면)

○ 규    모 : 공유수면 매립(A=208,275㎡)

(1공구: 36,101㎡, 2공구: 58,910㎡, 3공구: 113,264㎡)

○ 사 업 비 : 8,100백만원(도급 6,907  관급336  감리 857)

○ 공사기간 : 2016. 07. ~ 2018. 12.

○ 공 정 율 : 70%

□ 지금까지 추진상황

○ ‘08. 04 : 송공지구 공유수면 매립면허 승인

○ ‘10. 04 : 송공지구 공유수면 실시계획 승인

○ ‘13. 07 : 공사 계약 및 착공

○ ‘15. 08 : 공유수면 매립공사 부분준공

○ ‘15. 08 : 공유수면 매립공사 지형도면고시

○ ‘16. 03 : 공유수면 매립공사 실시계획 변경인가 신청

○ ‘16. 06 : 공유수면 매립공사 실시계획 변경인가 승인

○ ‘16. 07 : 공유수면 매립공사 타절 부분준공

○ ‘16. 08 : 공유수면 매립공사(2공구) 실시설계용역 착수

○ ‘16. 12 : 공유수면 매립공사(2공구) 실시설계용역 완료 및 발주

○ ‘17. 03 : 공유수면 매립공사(2공구) 1차분, 2차분 계약

○ ‘17. 06 : 공유수면 매립공사(2공구) 1차분, 2차분 변경계약

○ ‘17. 06 : 공유수면 매립공사(2공구) 1차분 준공

○ ‘17. 06 : 공유수면 매립공사(2공구) 2차분 기성

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	70

□ 문제점 및 대책

○

□ 향후 추진계획

○ ‘17. 12. : 공유수면매립공사(2공구) 2차분 준공

○ ‘18. 12. : 공유수면 매립공사 준공 예정

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 8,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	대물	합계	국비	도비	군비	대물
합계	8,100			8,100		7,129			7,129
2016	1,000			1,000		1,329			1,329
2017	3,000			3,000		3,500			3,500
2018.6	4,100			4,100		2,300			2,300
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여