2-3	천일염 명품화를 통하여 경쟁력 확보

특산물유통사업소 / 소장 박운기 / 농수산물판매담당 전창운 / 담당자 황동식(240-8229)

천일염 명품화를 효율적으로 추진하기 위하여 등급화 수매 · 유통 시스템을

구축하고 브랜드화하여 신안 천일염의 세계적 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 천일염 등급화 및 수매제도 추진에 따른 장기 보관시설 설치

○ 천일염의 수급조절, 품질 고급화 등 체계적인 관리체계 구축

□ 지금까지 추진상황

○ 천일염 명품화를 위한 저장시설 구축

▪ 2015년도 : 6개소(장기 4, 중기 2)

▪ 2016년도 : 3개소(장기 3 / 추진중 1)

▪ 2017년도 : 4개소(장기 2, 중기 2 / 추진중 4)

○ 천일염 유통구조 개선을 위한 노력

▪ 수매사업 추진 및 실무 협의회 개최 : 20회(‘15. 3 ~ ’17. 10)

▪ 수매사업 자금 국비지원건의 : 해수부 건의 6회, 국회 건의 5회 등

▪ 천일염 수매사업 추진

- 2016년 : 총 4만톤 수매완료(군 3, 해양수산부 1)

- 2017년 : 총 4.5만톤 수매계획(신안군 4, 해양수산부 0.5)

※ 2017. 10월말 기준 2.9만톤 수매 완료(연내 1.8만톤 추가 수매 계획중)

○ 천일염 가격 안정화를 위한 용역 추진 : 2017. 08 ~ 11월

▪ 천일염 유통구조 개선 및 정책 발굴을 위한 전문기관 용역 추진

○ 천일염 수출시장 개척을 위한 노력

▪ 2015년 : 중국내 신안 특산물 홍보 및 판매관 개설 운영

▪ 2016년 : 중국 강소성 의정시 등과 천일염 수출 협약 체결

▪ 2017년 : 중국 저장성 및 일본 내 천일염 수출을 위한 업무협약 체결 등

○ 기타 천일염 명품화 및 판매 활성화를 위한 노력

▪ 우수성 홍보를 위한 박람회 참가 : 15회(국내 13, 국외 2) ※중국, 일본

▪ 천일염 판매 확대를 직거래 행사 : 50회(대도시 및 수도권 마케팅)

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	95

□ 문제점 및 대책

○ 장기저장시설 건립사업은 해수부의 사업지침변경으로 사업시행이 지연       되었으며, 공사 진행 중 잦은 비로 인해 건축공사 지연

▪ ‘16년 장기저장시설 1개소 : ‘18. 04월까지 완공토록 추진

○ 수매천일염 중국수출은 중국정부의 허가를 받은 염업국, 수출업체 등과       실무협의를 통해 사업 추진(2018년부터 본격적인 수출 추진예정)

▪ 한중 국제정세에 따라 업무협의가 지연되고 있으나 지속적인 노력을 통해 연내 수출이 이루어 질 수 있도록 노력중

□ 향후 추진계획

○ 천일염 수출시장 개척을 위한 업무추진 : 2017. 9 ~ 2018. 6

▪ 수출국내 상표등록 및 온오프라인 판매망 구축

○ 2016년도 천일염 장기저장시설(1개소) 완공 : 2018. 4

○ 2017년도 천일염 중․장기저장시설(4개소) 착공 및 완공 : 2017. 2 ~ 2018. 4

○ 천일염 가격안정화 용역 결과를 토대로 정부 주도하 수매사업 추진 건의 및 수매자금 확보 노력 : 2017. 12 ~ 2018. 6

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 16,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	16,300	4,590	1,677	4,473	5,560	16,300	4,590	1,677	4,473	5,560
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	5,900	1,620	636	2,244	1,400	5,900	1,620	636	2,244	1,400
2016	4,400	1,170	501	969	1,760	4,400	1,170	501	969	1,760
2017	3,000	900	270	630	1,200	3,000	900	270	630	1,200
2018.6	3,000	900	270	630	1,200	3,000	900	270	630	1,200
임기후

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	여