3-1-3	신안 문화예술회관 및 문화원 건립

문화관광과 / 과장 박길호 / 문화예술담당 양승희 / 담당자 주성민 (240-8352)

군수님의 역점 시책인「신안 종합 복합타운」조성을 위한 문화관광과

소관「문화예술회관 및 문화원 건립」 사업 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 신안군 암태면 단고리 967번지 일원

○ 규    모 : 공연장(350석) 및 문화원

○ 사 업 비 : 7,100백만원 (국비 2,000, 지특 500, 군비 4,600)

▪ 문화예술회관 : 5,700백만원 (국비 2,000, 군비 3,700)

▪ 문   화   원 : 1,400백만원 (지특 800, 군비 600)

○ 사업내용 : 문화예술회관(대공연장, 분장실, 연습실), 문화원(사무실, 소공연장, 회의실, 전시실, 도서실 등)

□ 지금까지 추진상황

○ 부지 확정 : 2016. 4월

○ 기본계획 및 타당성 검토 용역 완료 : 2016. 9월

○ 문체부 최종선정 승인 : 2017. 4월

○ 지방재정 투자심사(도) 승인 : 2017. 5월

○ 설계용역 도 계약심사 완료 : 2017. 7월

○ 공공건축 사업 계획 사전검토 신청(건축도시공간연구소) : 2017년 10월

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
		50%

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후 추진계획

○ ‘17. 12. : 기본 및 실시설계용역 추진(제안공모)

○ ‘18. 05. : 실시설계 용역 추진(BF, 건축디자인 심의 등)

○ ‘18. 06. : 군계획시설 실시계획 인가 추진

○ ‘18. 10. : 문화예술회관 및 문화원 착공

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	7,100	2,800		4,300
2014
2015
2016
2017
2018.1	1,500	200		1,300
임기후	5,600	2,600		3,000

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부