3-1-8	홀리랜드 조성 사업

문화관광과 / 과장 박길호 / 관광개발담당 이명진 / 담당자 김형언(240-8357)

개신교의 최초 여성순교자이며, 섬 선교의 선구자 문준경 전도사 순교지

등을 중심으로 순교공원화 사업 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 신안군 증도면 대초리 일원

○ 총사업비 : 59,200백만원 (국비 2,800, 지특 17,800, 지방비 18,600, 민자 20,000)

○ 사업내용 : 순교지 및 관련 유적 정비, 관광자원화 사업 등

○ 사업기간 : 2017 ~ 2024 (7년)

○ 세부계획                                          (단위 : 억원)

구분	세 부 사업명	사업비	사업내용	재원 조달	재원 확보
1단계 (2017 ~ 2018)	증도 기독교 체험관 건립 사업	95 국비 28 지방비 67	- 기독교 체험관 - 부대시설	국비 30% 지방비 70%	문화체육관광부 종교문화시설 사업
	증도 한반도 해송숲 관광자원화 사업	97 지특 58 지방비 39	- 워터파크 조성 - 야외풀장 리모델링 - 생태탐방로 개설 - 주차장 조성 - 자전거 종합센터	지특 60% 지방비 40%	문화체육관광부 문화관광자원화 사업
2단계 (2018~ 2021)	관광인프라 구축 및 체험형 테마공원 조성	100 지특 70 지방비 30	- 디지털아트 센터 - 체육시설 및 공원 - 야외체험장, 조형물 - 야영장, 짚라인 등	지특 70% 지방비 30%	국토교통부 성장촉진지역개발 사업
3단계 (2019~ 2024)	증도 해양 관광· 휴양단지 조성	100 국.지특 50 지방비 50	- 상하수도 , 샤워장, 주차장 등	국.지 50% 지방비 50%	문화체육관광부 관광지 개발 / 국토교통부 남해안권발전종합계획 신규 개발지역지정 / 해양권 관광거점형 지역개발 시범사업
	숙박시설 확충	200 민자 200	- 청소년활동진흥법상 유스 호스텔 - 주민참여형 숙박시설 (생산관리지역→계획관리지역)	민자 100%

□ 지금까지 추진상황

○ 2016.  5 : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 완료

○ 2016.  5 : 지방재정투자심사

○ 2016. 11 : 2017 국고 및 지특 반영

○ 2016.  5. : 기본계획 수립 및 타당성조사용역 완료

○ 2016.  5. : 공유재산관리계획 취득 변경 승인

○ 2016.  9. : 산림청 교환부지 현장 답사(가거도)

○ 2016. 10. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청 (국가공공건축지원센터)

※ 건축서비스산업 진흥법(설계비 2.1억이상 사업계획 사전검토 후 설계공모 의무화)

- 기독교체험관건립 설계비 : 4.3억원

○ 2016. 10. : 공공건축 사업계획 사전검토 1차 보완 자료 요구

○ 2016. 11. : 공유재산관리계획 변경 (산림청 교환 3필지 추가)

○ 2016. 11. : 공공건축 사업계획 사전검토 회신

○ 2017. 06. : 홀리랜드조성사업 종합배치계획 수립 용역

완 료	이 행 후 계속추진(%)	추진중(%)	보 류	기 타
	50%

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후 추진계획

❍ 설계 공모 : 2017. 12.

❍ 기본조사 및 실시설계 : 2017. 12. ~ 2018. 03.

❍ 홀리랜드 2단계 도서개발사업 반영 추진 : 2018 ~ 2019

▪ 사 업 명 : 증도 테마공원 조성 사업

▪ 위    치 : 전남 신안군 증도면 대초리 산220-2임 (산림청 소유)

▪ 사 업 비 : 100억원 (지특 70, 군비 30)

▪ 사업내용 : 야영장, 레저 스포츠 시설(짚라인, 스포츠 클라이밍,  번지점프, 엠티비 파크), 체육시설, 숲 체험시설 등

❍ 군관리계획변경 (농림지역, 보존산지 해제) : 2018. 06.

❍ 건축 허가 : 2018. 03.

❍ 1단계 사업 착공 : 2018. 06. ~

□ 연도별 투자계획 및 실적

○ 총사업비 : 59,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
합계	59,200	20,600		18,600	20,000	3,833	1,400		2,433
2014
2015
2016
2017	3,700	1,400		2,433		3,833	1,400		2,433
2018.6	4,000	1,500		2,500
임기후	51,500	17,700		14,787	20,000

임기내 (2018. 6까지) 완료 가능 여부	부 (1단계 사업 정상 추진)